도시재생사업 추진현황

- 쇠퇴된 구도심을 진단하여 사회․경제․문화․환경적 활성화를 통해 지역균형     발전을 도모하고, 체계적이고 종합적인 도시재생 활성화 방안 마련

□ 사업 개요

공모유형	삼천포 구항 프로젝트 “바다마실, 삼천포愛 빠지다” (중심시가지형)	바다로 열리는 문화마을, 큰고을 大芳 굴항 (주거지지원형)
위 치	선구, 동서동, 동서금동 일원	대방동 250번지 일원
사업기간	2018.~2022.(5년)	2018.~2021.(4년)
총사업비	300억원 (국150,도30, 시120)	150억원 (국90,도18,시42)
사 업 량	A=291,829㎡	A=83,000㎡
사업내용	･복합교류공간 조성사업 등 14건	･생활인프라 개선사업 등 9건
기선정 여부	2017년 공모사업 선정	2018년 공모사업 선정

□ 추진사항

◦ 선정된 공모사업

가. 중심시가지형

- 2017. 12. 14. : 도시재생 특위 및 사업선정 발표(특위 심의)

- 2018. 05. 08. : 도시재생 선도지역 지정고시

- 2018. 05. 10. : 활성화계획수립을 위한 지방위원회 심의

- 2018. 05. 10. : 사천시 도시재생 활성화계획(안) 도시계획위원회 심의완료

- 2018. 06. 28. : 실현가능성 및 타당성 평가실시(국토교통부)

- 2018. 07. 31. : 도시재생 선도사업 활성화계획 국토부 승인완료

- 2018. 11. 27. : 사천시 도시재생현장지원센터 홈페이지 개설

- 2018. 12.  : 7004 복합교류공간 공사착공(건축/기계, 통신, 전기)

- 2019. 06. : 블루웨이 통합경관 조성사업 실시설계 용역 발주

청널마을 문화오름 설치사업 실시설계용역 발주

도시재생 복합교류공간 준공

- 2019. 09. : 도시재생 커피 바리스타 교육 및 도시재생대학 운영

- 2019. 12. : 어시장길 특성화사업, 에코주차장, 방파제 파도공원 조성공사 발주

- 2020. 03. : 청널공원 내 공원휴게시설 실시설계용역 발주

복합문화공간 및 시장지원거점시설 실시설계용역 발주

청년문화에비뉴(도시재생 어울림 플랫폼) 실시설계용역 발주

사천도시관리계획(청널) 공원조성계획 결정(변경) 용역 발주

- 2020. 05. : 방파제 파도공원(어구창고) 정비사업 준공
어시장길 특성화사업 준공

- 2020. 09. : 청널공원 주민거점화 착공

- 2020. 10. : 삼천포커뮤니티 에코주차장 준공, 복합문화공간 지혜의바다
착공

- 2020.11. :  청년문화에비뉴, 청널마을 문화오름 설치, 블루웨이 통합경관
(스카이워크) 착공

- 2021. 03. : 청널공원 주민거점화 준공

- 2021. 03. : 청널공원 주민거점화 준공

- 2021. 05. : 복합문화공간 ‘지혜의 바다’ 준공

- 2021. 05. : 실현가능성 및 타당성 평가 완료

- 2021. 07. : 활성화계획 변경 승인 고시

나. 주거지지원형

- 2018. 08. : ‘18년 도시재생 뉴딜 공모 선정

- 2018. 10. : 선도지역 지정을 위한 공청회 개최

- 2018. 12. : 도시재생 선도지역 지정 고시

- 2019. 01. : 활성화계획 수립을 위한 주민설명회 개최

- 2019. 02. : 도시재생활성화계획 지방위원회심의

- 2019. 09.  : 활성화계획 승인(국토부→사천시)

- 2019. 11. : 복합커뮤니티센터, 대방모두자리 보상 및 설계용역 발주, 도시재생대학 운영

- 2020. 02. : 도시계획시설 결정(변경) 고시

- 2020. 03.: 복합커뮤니티센터 BF인증 용역, 생활인프라 개선
사업 설계용역 발주, 굴항 재생공간 보상계획 공고

- 2020. 04. : 복합커뮤니티센터 조성부지 건축물 철거공사 준공

- 2020. 05. : 클린하우스 설치 부지 수목정비공사 준공

- 2020. 08. : 대방 모두자리 신축부지 건축물 해체공사 준공

- 2020. 10. : 대방모두자리 조성사업 건축공사, 복합커뮤니티센터 조성사업 건축공사 착공

- 2021. 01. : 도시계획시설 결정 고시(문화시설 1개소)

- 2021. 01. : 생활인프라개선사업 부지 보상 협의

- 2021. 02. : 생활인프라개선사업 크린하우스 운영

- 2021. 02. : 복합커뮤니티센터(문화시설) 보상계획 공고 및 감정평가 실시

- 2021. 02.  : 굴항공간재생사업 지장가옥 철거공사

- 2021.  3.  : 굴항공간재생사업 지장가옥 철거공사 준공

- 2021.  3.  : 모두자리조성사업 지장물 보상완료

- 2021.  3.  : 생활인프라개선사업 토지 등 보상완료

- 2021.  4.  : 모두자리조성사업 지장가옥 철거 완료

- 2021.  4.  : 모두자리조성사업 지장물 보상완료

- 2021.  4.  : 생활인프라개선사업 토지 등 보상완료

- 2021.  5.  : 굴항 공간재생사업 실시설계용역 착수

- 2021. 6.  : 생활인프라 개선사업 바닥페이빙 완료

□ 기대효과

◦ 도시의 자생적 성장기반 확충과 도시 경쟁력 제고

◦ 지역 공동체 회복을 통한 시민의 삶의 질 향상