2008. 1월말 현재

곤양면 주요 현안사업

곤   양   면

2008년도 현안사업 추진상황

□ 서부종합사회복지관 신축

◈ 위    치 : 곤양면 서정리 998-3번지 외 7필지

◈ 사 업 량 : 지상3층(1,230.97㎡)

◈ 사 업 비 : 1,900백만원

◈ 사업기간 : 2007 ~ 2008

◈ 시 행 청 : 사천시 (사회복지과)

○ 추진사항

- 복합건물(보건지소)로 기본 및 실시설계 완료

○ 향후계획

- 2008. 7월 서부종합사회복지관 착공 예정

□ 광포일반산업단지 조성

◈ 위    치 : 사천시 곤양면 대진리, 서포면 조도리 일원

◈ 조성면적 : 2,716천㎡

◈ 사업기간 및 사업비 : 2008~ 2011년 / 5,735억원

○ 추진사항 : 사전환경성검토 주민설명회 개최(‘07.12월)

○ 향후계획 : 공유수면매립기본계획 반영 요청(‘08. 3월),

일반산업단지 지정 요청(’08. 5월)

□ 농촌마을 종합개발

◈ 위    치 : 사천시 곤양면 무고리,맥사리

◈ 사 업 량 : 2단계사업(다랭이논 체험농원기반조성외 5건)

◈ 사업기간 및 사업비 : 2008. 1 ~ 2009. 12 (1,787백만원)

◈ 시 행 청 : 한국농촌공사 사천지사

○ 추진사항

- 사업대상지 확정 및 설계용역 완료

※ 2008. 1월 현재 전체 공정 10%

○ 향후계획

- 2단계 사업추진 : 다랭이논 체험농원기반조성 외5건

□ 곤양,서포지구 노후상수관 교체공사

◈ 위    치 : 사천시 곤양면 및 서포면 일원

◈ 사 업 량 : 노후관 개량 L=13.96km

◈ 사업기간 및 사업비 : 2007. 07. ~ 2008. 05. / 875백만원

◈ 시 행 청 : 한국수자원공사 사천수도서비스센터

○ 추진사항 : 2008. 1월 현재 전체 공정 41.5%

○ 향후계획

- 명절이후, 잔여 배수관 개량공사를 5월말까지 완료

※ 원활한 도로소통을 위해 단계별 도로포장공사를 시행

제 1 단계 (명절 전까지)		교통량이 많고 노후관 개량이 완료된 구간 명절 이전 우선 도로포장 실시 (전체의 35%)
제 2 단계 (명절이후~4월말)		가정 급수관 제외한 배수관 개량 완료 구간에 대해 도로포장 실시
제 3 단계 (5월말 까지)		가정 급수관 공사 완료 및 골목구간에 대한 잔여 도로포장 실시