1-11	노인문화복지센터 건립 지속추진

			관리번호		1-11
추진부서	노인장애인과	협조부서
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기 후	팀 장	강종희 (2094)	담당자		안점효 (2093)
임기 중 목표	80%	추진상황	정상추진	추진율		35%

목    적

❍ 날로 다양해져 가는 노인들의 복지서비스 욕구에 부응

❍ 노인들의 건강관리 및 여가선용을 위한 양질의 복지서비스 제공

사업개요

❍ 사업기간: 2019년 ~ 2027년

❍ 사업내용: 3개권역(서부, 동부, 남부) 노인문화복지센터 건립

❍ 총사업비: 24,600백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	24,600	6,010	18,590	-	500	9,500	4,500	4,090
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	24,600	6,010	18,590	-	500	9,500	4,500	4,090
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 서부노인문화복지회관 기본 및 실시설계 용역: 2019. 3 ~ 2020. 11월

❍ 서부노인문화복지회관 공사 착공: 2020. 12월

❍ 서부노인문화복지회관 공사 완료: 2022. 1월

❍ 동부노인문화복지센터 신축 행정절차 이행: 2021. 7 ~ 2022. 8월

❍ 동부노인문화복지센터 설계공모 중단: 2022. 12월

- 문화체육과 공모사업인 시니어 친화형 국민체육센터와 함께 총괄 발주 예정

추진상 애로사항 및 대책

❍ 노인문화복지센터 건립에 많은 사업비가 소요되어 사업비 확보에 어려움이 있어 사업 기간 장기화 우려

❍ 물가상승에 따른 토지보상비 및 공사비 증액 예상

향후 추진계획

❍ 시니어 친화형 국민체육센터 공모사업에 선정됨에 따라 동부 노인 문화복지센터와 함께 총괄발주 예정(문화체육과 추진)

- 설계공모 및 실시설계 용역: 2024. 1 ~ 2024. 6월

- 공사 착공 및 준공: 2024. 7 ~ 2025. 12월

❍ 남부노인문화복지센터 건립사업 추진: 2025. 1 ~ 2027. 12월

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	33%	45%	55%	66%	80%	100%
주민참여예산 제도 확대 추진	서부노인 복지회관 준공	동부노인 문화복지센터건립 추진	동부노인 문화복지센터건립 추진	동부노인 문화복지센터 준공	남부노인 문화복지센터건립 추진	사업 완료