1-6	사남면행정복지센터 신축

			관리번호		1-6
추진부서	행정과	협조부서	도시재생과
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	강정희 (2569)	담당자		이성복 (2565)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		10%

목    적

❍ 공동주택 신축에 따라 지속적으로 인구가 증가하고 있어, 행정수요의 증가 및 다양화로 행정서비스 제고를 위해 복합청사 신축성 대두

❍ 시민들의 문화공유 및 여가활용 공간 확보

사업개요

❍ 위    치: 사남면 진삼로 1108 일원

❍ 사업기간: 2024년 ~ 2026년

❍ 사 업 비: 8,000백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	8,000		8,000		1,910	2,270	3,820
국비	2,800		2,800		700	700	1,400
도비	360		360			360
시비	4,840		4,840		1,210	1,210	2,420
민자/기타

추진상황

❍ 그린리모델링 사업 추진계획 수립(방침): 2022. 7.

❍ 그린리모델링 관련 부서 의견 조회: 2023. 1.

- 청사 내외의 근본적인 문제해결(사무공간, 내진보강, 구조보강, 석면제거)과 사업의 효용성 및 주민만족도를 위해 청사 신축 의견 회신(도시재생과, 사남면)

❍ 그린리모델링 사업 변경(신축) 수립(방침): 2023. 1.

❍ 사남면 기초생활거점조성사업 예비계획 수립 용역 시행: 2023. 2.

❍ 사남면 기초생활거점조성사업 신청: 2023. 5.

❍ 사남면 기초생활거점조성사업 선정: 2023. 8.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 당초 청사 그린 리모델링(2022. 7.) 사업으로 추진코자 하였으나, 리모델링사업의 경우 신축에 상응하는 예산이 투입되지만 협소하고 한정된 공간으로 투입 사업비 대비 직원의 근무환경 개선과 주민만족도 낮음

❍ 특히, 청사의 근본적 문제해결(내진성능평가에 따른 내진 보강과 정밀안전진단에 따른 구조 보강 석면제거)을 위해 신축 공모 추진

※ 일반농산어촌개발사업 기초생활거점조성사업 공모 추진

〔총사업비 40억 / 국비 70%(28억), 도비9%(3.6억), 시비21%(8.4억)〕

향후 추진계획

❍ 청사 신축 등 기본 계획 수립 용역 추진: 2024. 2

❍ 청사 신축 등 시행 계획 수립 용역 추진: 2024. 9

❍ 사업시행: 2025. 4

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)			50%	80%	100%
알반농산어촌 개발사업추진			실시설계	청사신축 착공	청사준공