1-9	경로당 신축[향촌동, 동서금동]

			관리번호		1-9
추진부서	노인장애인과	협조부서	향촌동, 동서금동
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기 내	팀 장	강종희 (2094)	담당자		안점효 (2093)
임기 중 목표	완료	추진상황	미착수	추진율		-

목    적

❍ 노인들의 여가시설인 경로당을 신설하여 어르신들에게 안전하고 쾌적한 휴식공간을 제공하고자 함

사업개요

❍ 위    치: 동서금동, 향촌동

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2024년

❍ 사업내용: 경로당 신축 2개소

❍ 사 업 비: 800백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	800	-	800	-	800	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	800	-	800	-	800	-	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 시장공약사업 추진계획 보고

❍ 경로당 신축(재건축) 및 신설(건물매입) 지원기준(안) 마련 및 배포

❍ 경로당 신설에 필요한 건물 확보를 위해 해당 동과 사전 협의 중

❍ 사업 추진을 위한 협의 및 마을주민 의견수렴

❍ 매입대상지 해당 동과 협의: 2023. 12월

추진상 애로사항 및 대책

❍ 두 지역 모두 주민 자체 재산이 없어 경로당 신축 부지확보 애로 및 기부채납 불투명

❍ 공동주택 및 근린생활시설을 시에서 매입 후 용도변경 및 리모델링 할 수 있도록 신설 지원기준 마련

- 노유자시설 용도변경 기준 충족 및 입주민 또는 상인회 동의 필수

- 기준 충족 건물이 없거나, 입주자[상인회] 미동의 시 부득이 설치 불가

향후 추진계획

❍ 매입대상지 해당 동과 추가 협의: 2024. 2월

- 지원기준에 적합한 대상지 확보가 어려울 시 부득이 사업 추진 불투명

❍ 매입대상지 선정 후 행정절차 이행: 2024. 2월

❍ 건축물 매입 및 소유권 이전: 2024. 6월

❍ 리모델링 완료 및 경로당 등록 후 개관: 2024. 12월

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)			100%
경로당 신설 2개소			경로당 신설 2개소