2-10	항공MRO 산업단지 조기 완공

			관리번호		2-10
추진부서	투자유치산단과	협조부서	경상남도 항공우주산업과
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	배명희 (3469)	담당자		김수언 (3465)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		40%

목    적

❍ 항공선도기업인 KAI·KAEMS 인접 지역에 항공 MRO 단지 조성으로 연구개발·생산·MRO가 일괄된 항공산업 클러스터 조성

사업개요

❍ 위    치: 사천시 사천읍 용당리 일원

❍ 사업기간: 2017년 ~ 2025년

❍ 사업내용: 산업단지 조성 299,765㎡

- 1,2단계 149,628㎡, 3단계 150,137㎡

❍ 사 업 비: 175,910백만 원(도비 40%, 시비 60%)

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	175,910	125,500	50,410	21,000	14,705	14,705
국비
도비	70,364	50,500	19,864	6,000	6,932	6,932
시비	105,546	75,000	30,546	15,000	7,773	7,773
민자/기타

추진상황

❍ 항공정비사업(MRO) MOU 체결(경상남도, 사천시, KAI): 2014. 12.

❍ 2018년 제1차 지방재정 중앙투자심사(조건부/120,000㎡, 430억): 2018. 4.

❍ 산업단지계획 승인 및 고시(1, 2단계/149,424㎡): 2018. 12.

❍ 2019년 제1차 지방재정 중앙 투자심사(조건부/149,424㎡, 951억): 2019. 3.

❍ 1, 2단계 공사 착공: 2019. 6.

❍ 산업단지계획 변경 승인 고시(149,424→149,628㎡): 2019. 11.

❍ 공사 준공(1단계 1차분): 2019. 12.

❍ 1단계 개발토지 임대계약 체결(사천시, KAEMS): 2020. 6.

❍ 타당성 재조사(한국지방행정연구원): 2020. 11.

❍ 2021년 제1차 지방재정 중앙투자심사(조건부/311,880㎡ 1,480억): 2021. 2.

❍ 경상남도지방산업단지계획 심의(조건부 가결): 2022. 5.

❍ 산업단지계획(변경) 승인 및 고시(1,2,3단계)(149,628→299,765㎡): 2022. 6.

❍ 경상남도지방건설기술심의(경남도): 2022. 7.

❍ 산업단지계획(변경) 합동설명회 개최(환경, 교통, 재해 등): 2022. 11.

❍ 경상남도지방토지수용위원회 심의(토지: 28필지, 지장물: 605건): 2022. 12.

- 수용개시: 2023. 2. 17.

❍ 경상남도지방토지수용위원회 심의(토지 5필지): 2023. 1.

- 수용개시: 2023. 3. 24.

❍ 3단계 공사 계약(총괄분, 1차분):  2023. 2.

❍ 3단계 공사 착공(1차분, 8,461백만 원): 2023. 2.

❍ 도비 추가 지원 건의(경남도 항공우주산업과): 2023. 3.

❍ 경상남도지방산업단지계획심의위원회 심의(조건부 가결): 2023. 3.

❍ 도비 추가 지원 건의(경남도 항공우주산업과 2차): 2023. 4.

- 도비 추가지원 계획: 2024~2025년에 도비 103억 원 지원 예정

❍ 일반산업단지계획 변경 승인 및 지형도면 고시: 2023. 5.

❍ 해안도로변 발굴(정밀)조사 부분완료 승인: 2023. 9.

❍ 1단계 공공청사용지 매매계약서 체결(경남경찰청): 2023. 9.

❍ 공사착공(1단계 4차분): 2023. 9.

❍ 용당2리 이주단지 발굴조사 완료 승인: 2023. 10.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 용당2리 이주 지연에 따른 후속 공정 추진 지연

- 2024. 1월 용당2리 이주자택지 공급관련 주민설명회 예정(공급가격 등)

향후 추진계획

❍ 1,2단계 공사 준공: 2024. 12.

❍ 사업 준공(총괄): 2025. 12.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	35%	40%	80%	100%
산업단지 조기 완공	용지 보상, 산업단지(1, 2단계) 공사 및 이주단지 (용당1리) 조성 추진	산업시설용지 중 일부 구간 KAI와 KAEMS에 우선 제공 및 이주단지 (용당2리) 조성 추진	공사 준공 (1, 2단계) 및 산업단지 조성(3단계), 이주 완료 (용당2리)	산업단지 완공