2-5	드론 관련 산업 육성 및 지원

			관리번호		2-5
추진부서	우주항공과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	황현준 (3484)	담당자		최석민 (3486)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		50%

목    적

❍ 사천시 드론 산업 육성 및 드론 전문인력 양성

사업개요

❍ 위    치: 사천시 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2026년

❍ 사업내용

- 드론 관련 전문인력 양성

- 드론 제작･개발업체 육성 및 지원

❍ 사 업 비: 350백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	350		350	50	100	100	100
국비
도비
시비	350		350	50	100	100	100
민자/기타

추진상황

❍ 2023년 재난안전 연구개발 성과이음 지원사업 공모(행안부): 2023. 3.

❍ 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발사업* 업무협약 체결: 2023. 4.

❍ 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발사업 참여기업 선정: 2023. 6.

❍ 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 기본 설계, 지상통제시스템 구성 설계: 2023. 9.

❍ 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발사업 연차보고회: 2023. 12.

	《 사 업 개 요 》
❍ (사 업 명) 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발 사업 ❍ (사업기간) 2023년 ~ 2026년 (4년) ❍ (총사업비) 5,200백만 원(경남도 1,500 / 사천･진주･고성 각 1,100 / 민간 400) ❍ (주관기관) 경남TP 항공우주본부(본부장 옥주선) ❍ (사업내용) 시제기 설계 및 제작, 통합 비행조종 시스템 개발, 추진계통 설계 통합, 시험평가 및 실증

❍ 경남형 미래항공모빌리티(AAM) 항로 발굴 및 실증사업* 업무협약 체결: 2023. 4.

❍ 경남형 미래항공모빌리티(AAM) 항로 발굴 및 실증사업 참여기업 선정: 2023. 6.

❍ 경남형 미래항공모빌리티(AAM) 해양관광 항로 설계: 2023. 8.

❍ 경남형 미래항공모빌리티(AAM) 버티포트 최적지 분석 및 입지선정: 2023. 9.

❍ 경남형 미래항공모빌리티(AAM) 항로발굴 과제 연차보고회: 2023. 12.

	《 사 업 개 요 》
❍ (사 업 명) 경남형 미래항공모빌리티(AAM) 항로 발굴 및 실증사업 ❍ (사업기간) 2023년 ~ 2025년 (3년) ❍ (총사업비) 750백만 원(경남도･사천･진주･고성 각 150 / 민간 150) ❍ (주관기관) 경남TP 항공우주본부(본부장 옥주선) ❍ (사업내용) 공역 및 항로 설계, 버티포트 최적지 분석, 전파환경 분석, UAM 항로 타당성 검증 등

❍ 드론 자격증 취득지원 사업* 교육대상자 모집 및 선정: 2023. 6.

❍ 드론 자격증 취득지원 사업 교육대상자 자격증 취득 완료: 2023. 12.

	《 사 업 개 요 》
❍ (사 업 명) 드론 자격증 취득지원 사업 ❍ (사업기간) 2023년 6월 ~ 12월 ❍ (총사업비) 25백만 원(시비 25) ❍ (지원대상) 시민 20명 ❍ (사업내용) 드론 자격증(1종 또는 2종) 취득자 교육비 50% 지원

❍ 직원 대상 드론 자격증 취득지원 사업* 교육대상자 모집 및 선정: 2023. 8.

❍ 직원 대상 드론 자격증 취득지원 사업 교육대상자 자격증 취득 완료: 2023. 12.

	《 사 업 개 요 》
❍ (사 업 명) 드론 자격증 취득지원 사업 ❍ (사업기간) 2023년 6월 ~ 12월 ❍ (총사업비) 25백만 원(시비 25) ❍ (지원대상) 직원 25명 ❍ (사업내용) 드론 자격증(3종) 취득자 교육비 전액 지원

추진상 애로사항 및 대책

❍ 공군제3훈련비행단 관련 공역 제한으로 시제기 실증 및 항로 발굴 한계

- 부산･경남･전남 남해안권 비행자유구역 지정 추진(경상남도)

향후 추진계획

❍ 시제기 상세설계 및 시험용 비행 기체 제작: 2024. 1. ~ 12.

❍ 응급의료 항로(삼천포종합운동장~경상국립대학병원) 설계: 2024. 1. ~ 12.

❍ 드론 전문가 양성사업 추진(시민 40명 / 공무원 45명): 2024. 1. ~ 12.

❍ 미래항공모빌리티 인재 양성사업 추진: 2024. 1. ~ 12.

❍ 드론 활용 축제현장 안전관리 실증사업 추진: 2024. 2.

❍ 드론 영상관제 시스템 운용: 2024. 3. ~

❍ 미래항공모빌리티 및 우주산업 국제 컨퍼런스 개최: 2024. 11.

	《 사업개요 》
❍ (사 업 명) 드론 활용 축제현장 안전관리 실증 ❍ (위 치) 사천시 일원(*와룡문화제, 선진리성 벚꽃축제 등) ❍ (사업기간) 2024. 2. ~ 10.(9개월) ❍ (사 업 비) 22백만 원 ❍ (사업내용) 테더드론을 활용하여 축제장 내 안전상황 실시간 모니터링 및 AI 알고리즘을 통한 인파의 움직임, 밀집도, 위험도 예측 및 실증 등

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	40%	70%	100%
드론 관련 산업 육성 및 지원	- 시제기 개발 및 항로발굴 사업 추진	- 시제기 개발 및 항로발굴 사업 추진 드론 전문인력(공공, 민간) 양성사업 추진	- 시제기 개발 및 항로발굴 사업 추진 드론 전문인력(공공, 민간) 양성사업 추진 드론 활용 축제현장 안전관리실증사업 추진	- 시제기 개발 및 항로발굴 사업 추진 드론 전문인력(공공, 민간) 양성사업 추진