3-11	패러글라이딩 착륙장 조성

			관리번호		3-11
추진부서	문화체육과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	김성훈 (2419)	담당자		노범석 (2415)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		60%

목    적

❍ 패러글라이딩 전용 착륙장 조성으로 산림레포츠 활성화 및 이용자들의 안전 확보

사업개요

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2024년

❍ 사 업 량: 패러글라이딩 착륙장 조성

❍ 사업내용: 부지매입 및 착륙장 조성 1식

❍ 사 업 비: 800백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	800		800	800
국비
도비
시비	800		800	800
기금

추진상황

❍ 공유재산 심의: 2022. 11.

❍ 분할측량 및 감정평가 실시: 2023. 2.

❍ 편입토지 보상 완료: 2023. 4.

❍ 패러글라이딩 협회 현장협의: 2023. 8.

❍ 실시설계용역 : 2023. 10.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당사항 없음

향후 추진계획

❍ 공사 착공 및 준공: 2024. 1. ~ 2.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		60%	100%
패러글라이딩 착륙장 조성		보상완료	착공 및 준공