3-15	비토섬 관광지 개발

			관리번호		3-15
추진부서	관광진흥과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	하진건 (2734)	담당자		양현철 (2731)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		15%

목    적

❍ 비토섬 관광지 개발 및 별주부전 테마 강화로 관광인프라 확충 및 관광 활성화

사업개요

❍ 위    치: 서포면 비토리 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2025년

❍ 사업내용: 탐방보도교 L=180m, 인도설치 L=150m, 포토존 조성

❍ 사 업 비: 1,850백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	1,850		1,850	50	-	800	1,000	-
국비	900		900		-	400	500
도비	270		270		-	120	150
시비	680		680	50	-	280	350	-
민자/기타

추진상황

❍ 주민협의: 2023. 5.

❍ 기본구상 용역 완료: 2023. 6.

❍ 관광자원개발사업 수요조사서 제출: 2023. 6.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당없음

향후 추진계획

❍ 공모사업 선정: 2024. 11.

❍ 2025년분 공사 착공: 2025. 2.

❍ 2025년분 공사 준공: 2025. 12.

❍ 2026년분 공사 착공: 2026. 2.

❍ 사업 완료: 2026. 6.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)				45%	100%
비토섬 관광지 개발				2025년분 공사 준공	2026년분 공사 준공