3-16	삼천포 무지갯빛 생태탐방로 조성

			관리번호		3-16
추진부서	관광진흥과	협조부서
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기 후	팀 장	하진건 (2734)	담당자		김진우 (2730)
임기 중 목표	추진(60%)	추진상황	정상추진	추진율		15%

목    적

❍ 사천바다 케이블카와 연계한 해양관광 바닷길 조성으로 해양관광 거점도시 인프라 확충

사업개요

❍ 위    치: 동서동 일원(늑도~신도~마도~저도)

❍ 사업기간: 2020년 ~ 2027년

❍ 사업내용: 생태탐방로 설치 L=1.67km, B=2.0m (국립공원 내 1.47km)

❍ 사 업 비: 68,300백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	68,300	200	68,100		1,000	8,400	8,400	50,300
국비	49,700		50,800		500			50,300
도비	150		150		150
시비	17,350	200	17,150		350	8,400	8,400	-
민자/기타

추진상황

❍ 국립공원 저지대 탐방서비스 경연대회 선정(특별상 수상): 2019. 3.

❍ 국토교통부 「남해안권 발전종합계획 변경」 최종 확정: 2020. 6.

❍ 기획재정부 「한국판 뉴딜–그린뉴딜」 종합계획 반영: 2020. 7.

❍ 국립공원 생태 문화·교육 플랫폼 기본구상 수립용역 추진: 2020. 10.

❍ 기본구상 수립결과 반영(국립공원공단): 2021. 4.

❍ 한려해상국립공원 사천지구 해상탐방로 공원계획(변경)용역 착수: 2022. 1.

❍ 환경부(자연공원과) 공원계획 반영 사전 협의: 2022. 12.

❍ 사전 타당성 조사 용역 시행: 2023. 2.

❍ 타당성 조사 용역 완료: 2023. 7.

❍ 도시계획시설 결정(변경) 용역 시행: 2023. 9.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 늑도 ~ 신도 구간 우선 개설 등 대안 마련 (한려해상국립공원 행위허가)

향후 추진계획

❍ 실시설계 용역 시행: 2024. 1.

❍ 한려해상국립공원 행위허가, 공유수면 점사용 신청: 2024. 7.

❍ 공사 착공: 2025. 1.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		15%	30%	50%	60%	100%
무지개빛 생태탐방로 조성사업		타당성 조사 용역, 도시계획시설 결정 용역	실시설계 용역, 행정절차 진행	2025년분 공사 준공	2026년분 공사 준공	사업 완료