3-20	용현~대포 해안도로 관광자원화 기반 마련

			관리번호		3-20
추진부서	관광진흥과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	하진건 (2734)	담당자		양현철 (2732)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		5%

목    적

❍ 스토리와 특색있는 관광기반시설 조성으로 관광 인프라 확충

사업개요

❍ 위    치: 용현면 덕곡리 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2026년

❍ 사업내용

- 선상지 경관전망대 1식(높이 30m, 건축면적 A=800㎡)

- 경관개선 쉼터조성, 선상지 갤러리 조성, 야관경관 등 부대시설 조성

- 대지미술 선상지 우물경관 활용 투어코스 개발

❍ 사 업 비: 18,600백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	18,600		18,600		1,000	8,000	9,600
국비	9,300		9,300		500	4,000	4,800
도비	2,790		2,790		150	1,200	1,440
시비	6,510		6,510		350	2,800	3,360
민자/기타

추진상황

❍ 남부권 광역관광개발 계획 신규사업 신청: 2022. 6.

❍ 남부권 광역관광개발 계획 지역협의회 참석: 2023. 2.

❍ 남부권 광역관광개발계획 반영 확정: 2023. 7.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당없음

향후 추진계획

❍ 기본 및 실시설계 용역 착수: 2024. 1.

❍ 공사 착공: 2025. 1.

❍ 사업 완료: 2026. 12.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		20%	40%	70%	100%
선상지 마인드마크 조성사업		기본 및 실시설계	보상 협의	공사 추진	사업 완료