3-24	재래시장 활성화 지원 및 주차시설 확보

			관리번호		3-24
추진부서	지역경제과	협조부서	-
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	최형주 (3064)	담당자		한현상 (3061)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		30%

목    적

❍ 재래시장(전통시장) 시설물 보수 및 현대화로 경제 활성화 제고

사업개요

❍ 지원대상: 사천시 전통시장 8개소

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2026년

❍ 사 업 량: 4개 사업(전통시장 활성화 3, 주차시설 1)

❍ 사업내용

- 전통시장 활성화 지원사업: 시설 현대화 사업(아케이드보수), 전통시장 활성화사업

(노후전기, 화재알림), 하수구 정비 및 시설물 보수

- 주차시설 확보사업: 사천읍시장 주차타워 설치

❍ 사 업 비: 4,512백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	4,512	1,667	2,845	970	875	500	500	-
국비	258	170	88	-	88	-	-	-
도비	1,790	489	1,301	264	437	300	300	-
시비	2,447	991	1,456	706	350	200	200	-
민자/기타	17	17

추진상황

❍ 2022년

(단위: 백만 원)

구 분	사 업 개 요		사 업 비
	위 치	사 업 내 용
전통시장 시설 현대화 사업	소 계		815
	사천읍시장	아케이드 교체 및 기둥 도장	230 (도 138, 시 92)
		전기시설 보수공사	235 (도 141, 시 94)
	삼천포중앙시장	전기시설 보수	350 (도 210, 시140)
전통시장 활성화 사업	소 계		560
	삼천포중앙시장	출입구 기둥 도색공사	20
	삼천포전통수산시장	비가림시설 보수	160
		상인회 사무실 철거 및 정비	20
	전통시장 8개소	전통시장 노후시설 긴급보수	50
	삼천포종합시장	주차장 보수공사	30
	삼천포수산시장	옥상방수	200
	전통시장 8개소	하수관로 준설	80
전통시장 기반강화사업	소 계		291
	사천읍·완사· 삼천포전통수산시장	화재알림시설 설치사업	120 (국 84, 시 36)
	삼천포 용궁수산시장	노후전선 정비사업	171 (국 85.5, 시 85.5)

❍ 2023년

(단위: 백만 원)

구 분	사 업 개 요		사 업 비	추 진 사 항
	위 치	사 업 내 용
전통시장 시설 현대화 사업	소 계		440
	사천읍시장	아케이드 교체	272 (도 163, 시 109)	· 공사완료(7월)
	삼천포중앙시장	비가림시설 보수 및 우수측구 교체	168 (도 101, 시 67)	· 공사완료(6월)
전통시장 활성화 사업	소 계		330
	사천읍시장	주차타워 설치	30	· 소유자 협의 중
	완사시장	옥상 태양광 설치	20	· 공사 완료(6월)
		옥상 정밀 안전진단	20	· 용역 완료(3월)
	서포시장	CCTV 설치	20	· 공사 완료(3월)
		우수관로 정비	20	· 공사 완료(10월)
	삼천포중앙시장	먹자골목 조성 컨설팅 용역	20	· 용역 완료(5월)
	전통시장 8개소	하수관로 준설 및 보수	200	· 공사 완료(7월)
	새벽시장 정비	아케이드 설치 및 정비	190	· 공사 완료(12월)

추진상 애로사항 및 대책

❍ 토지소유자 매매 동의서 합의 애로

- 상인회와 협의하여 토지소유자 지속적인 협의

❍ 전통시장 주차환경개선 도 공모 신청 선정 필수

향후 추진계획

❍ 24년도 전통시장 시설현대화 사업 추진(사천읍·곤양·중앙·전통수산시장)

❍ 공모사업 신청

- 24년도 화재알림 설치사업, 노후전기 보수사업 신청

- 25년도 전통시장 시설현대화 사업 신청(24년 3월)

❍ 주차시설 확보(사천읍시장 주차타워 설치)

- 2024. 7.: 전통시장 주차환경개선사업 공모 신청

- 공모사업으로 국비 확보(60%) 후 ’25년 2월 보상 및 착공, ’25년 12월 준공

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	60%	80%	100%
재래시장 활성화 지원 및 주차시설 확보	2022년 공모사업 및 활성화 사업 수행완료	2023년 공모사업 및 활성화 사업 수행완료	2024년 공모사업 및 활성화 사업 추진	2025년 공모사업 및 활성화 사업 추진	2026년 공모사업 및 활성화 사업 추진