3-29	사천형 축산물 로컬푸드 복합센터 건립

			관리번호		3-29
추진부서	농축산과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시/민간
완료시기	임기내	팀 장	김동한 (3780)	담당자		황현빈 (3784)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		5%

목    적

❍ 축산물 생산에서 가공, 유통, 소비까지 ONE-STOP 시스템 구축

❍ 로컬푸드의 사회적가치 확산을 통한 도농상생 활성화 기반 조성

❍ 안정적 판로 개척 및 지역경제 활성화 기여

사업개요

❍ 위    치: 사천시 관내

❍ 기    간: 2022년 ~ 2025년

❍ 내    용: 축산물 로컬푸드 복합센터 건립(연면적 1,815㎡, 2동 2층)

- 육가공 166, 한우프라자 728, 회의실 100, 판매장 198, 사무실 66, 창고 198

❍ 사 업 비: 9,902백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	9,902	-	9,902	-	8,869	1,033	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,936	-	1,936	-	1,936	-	-	-
민자/기타	7,966	-	7,966	-	6,933	1,033	-	-

추진상황

❍ 추진내용 및 사업비 검토: 2022. 6.

❍ 사업부지 선정 검토: 2022. 11.

- 당초: 사천IC 복합유통상업단지, 추가의견: 사천읍 앞뜰지구

❍ 민간 사업대상자 사업계획 검토 및 협의: 2023. 8.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 국비 사업 부재로 시 자체 사업으로 추진 시 자체 예산확보 필요하고 민간투자가 80% 투입되는 사업으로 사업자의 신속한 추진 의지가 필요한 사항임

❍ 민간 사업대상자 선정 지연으로 추진 애로

향후 추진계획

❍ 사업부지 검토: 2024 1.

❍ 추진계획 수립: 2024. 2.

❍ 사업대상자 선정: 2024. 3.

❍ 경상남도 지방재정투자심사 승인 요청: 2024. 5.

❍ 경상남도 지방재정투자심사 승인: 2024. 6.

❍ 보조금 교부결정 및 교부: 2024. 7.

❍ 실시설계용역(사업자): 2024. 8.

❍ 공사 시행 및 준공(사업자): 2024. 9. ~ 2025. 12.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	25%	50%	100%	-	-
사천형 축산물 로컬푸드 복합센터 건립	사업부지 선정 검토	사업부지 및 대상자 선정	보조금 교부 및 실시설계용역	준공	-	-