4-13	반려동물 가족을 위한 펫공원 조성

			관리번호		4-13
추진부서	농축산과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	김여랑 (3788)	담당자		김여랑 (3788)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		5%

목    적

❍ 사람과 반려동물이 공존하는 사회 분위기 조성

❍ 반려동물 관련 산업 기반 마련 및 신규 일자리 창출

❍ 반려동물로 인해 발생하는 사회적 갈등 완화를 위한 인프라 확충

사업개요

❍ 위    치: 사천시 관내

❍ 기    간: 2022년 ~ 2026년

❍ 내    용: 반려동물 펫공원 및 부대시설 건립

- 내외부 울타리, 격리장, 놀이시설, 음수대, 파라솔, 관리실, 주차장 등

❍ 사 업 비: 5,100백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	5,100		5,100	100	2,500	2,500	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,060	-	3,060		1,530	1,530
시비	2,040	-	2,040	100	970	970	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 일상감사 및 입찰공고: 2023. 4.

❍ 제안서 접수 및 평가, 협상적격자 선정: 2023. 4.

❍ 계약체결 및 용역 착수: 2023. 4.

❍ 착수보고회 개최: 2023. 5.

❍ 시민 의견수렴 설문조사: 2023. 8.

❍ 펫공원 조성 성별영향평가: 2023. 9.

❍ 펫공원 조성 설문조사 결과보고: 2023. 10.

❍ 펫공원 조성 타당성 조사용역 기간연장: 2023. 10.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 후보지 선정을 위한 기간 부족으로 타당성 조사 용역 기간 연장

- 추가 후보지 발굴 및 타부서 용역사업과 연계한 확대 조사 필요

- 후보지 선정시 대상 마을 주민 반대의견으로 추진 애로

향후 추진계획

❍ 타당성 조사 용역 및 기본계획 수립 최종보고: 2024. 1.

❍ 타당성 조사 용역 및 기본계획 수립용역 완료: 2024. 1.

❍ 펫공원 조성 실시설계 용역: 2024. 1.

❍ 공사 착공: 2024. 12.

❍ 공사 준공: 2026. 6.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	-	5%	30%	70%	100%	-
펫공원 조성	-	기본계획 수립용역	실시설계용역 및 착공	조성	준공	-