4-5	공동육아나눔터 확대 설치

			관리번호		4-5
추진부서	여성가족과	협조부서	회계과(재산관리팀)
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	김숙희 (2669)	담당자		나희진 (2665)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		60%

목    적

❍ 지역사회가 참여하는 돌봄공동체 공간 조성을 통해 양육친화적인 사회환경 구축

사업개요

❍ 위    치: 읍면지역

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2023년

❍ 사업내용: 공동육아나눔터 3호점 설치(공간구성, 비품구입 등)

❍ 사 업 비: 380백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	380		350	200	60	60	30	30
국비	90		75		30	30	15	15
도비	27		22		9	9	4	5
시비	213		203	150	21	21	11	10
민자/기타	50		50	50

추진상황

❍ 공동육아나눔터 확대 설치 추진 검토: 2022. 7.

❍ 설치공간 확보: 2022. 10.

- 사천읍 무산로 21, 2층(구, 미생물발효재단 사무실)

❍ 리모델링 공모사업 신청 및 현장심사(신한금융그룹 협력): 2023. 6.

❍ 공모사업 선정(여성가족부→도→시): 2023. 7.(리모델링비 평균 84백만 원 지원)

❍ 실시설계용역: 2023. 8.

❍ 추가공간 확보(최소 66㎡ 이상)를 위한 사전공사: 2023. 9. ~ 10.

❍ 공모사업 선정기관 공간조성공사 및 운영수탁자 선정: 2023. 12.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 공동육아나눔터 1호점(용현점) 이용자 다수(71%)가 사천읍․정동면․       사남면 거주자로 사천읍에 3호점 개소시 용현점 이용률 감소 우려

→ 추후 용현점 이용률 추이를 보아 용현점을 서부권으로 이전 검토

※ 용현공동육아나눔터 회원 현황(2022. 6. 30. 현재)

구분	계	사천읍	정동면	사남면	용현면	동지역	기타
회원수(명)	462	92	62	174	77	55	2
비율(%)	100	19.9	13.4	37.7	16.7	11.9	0.4

향후 추진계획

❍ 돌봄인력 채용 및 운영 준비: 2024. 1. ~ 2.

❍ 공동육아나눔터 3호점 개소: 2024. 3.

- 공동육아나눔터 설치에 따른 여성가족부 운영비 확보

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	90%	100%
공동육아나눔터 확대 설치	위치결정 및 공간확보	공사완공	개소