5-12	삼천포천(한내천) 제2의 청계천으로 조성

			관리번호		5-12
추진부서	건설과	협조부서
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	이현수 (3274)	담당자		배영환 (3271)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		30%

목    적

❍ 삼천포천 생태하천 복원사업으로 수질개선 및 수생태계 건강성 회복 등 수생태계 복원 효과 극대화로 삼천포천의 생태적 가치를 높이고자 함

사업개요

❍ 위    치: 사천시 와룡저수지 ~ 동서금동 일원

❍ 기    간: 2017년 ~ 2025년

❍ 내    용: 생태하천복원 L = 4.4km

- 생태유량확보(저수로 조성 L=3,263m), 여울 14개소, 탐방로 L=2,610m 등

❍ 사 업 비: 16,746백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	16,746	10,838	5,908	2,000	1,400	2,508
국비	8,373	5,419	2,954	1,000	700	1,254
도비	2,010	1,301	709	240	168	301
시비	6,363	4,118	2,245	760	532	953
민자/기타

추진상황

❍ 삼천포천 생태하천 복원사업 확정: 2016. 9.

❍ 삼천포천 생태하천 복원사업 확정: 2016. 9.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수: 2017. 11.

❍ 삼천포천 하천기본계획(변경) 고시: 2021. 5.

❍ 문화재 지표조사 완료: 2021. 11.

❍ 소규모 환경영향평가 협의 완료: 2021. 11.

❍ 지방건설기술심의위원회 공사기간 적정성 심의완료: 2021. 12.

❍ 지방건설기술심의위원회 설계 심의완료: 2022. 1.

❍ 생태하천복원사업 기술검토 완료(낙동강유역환경청): 2022. 2.

❍ 생태하천복원사업 자문위원회 심의 완료: 2022. 6.

❍ 중앙토지수용위원회 사업인정 협의 완료: 2022. 10.

❍ 삼천포천 생태하천 복원사업 2022년분 착공: 2022. 10.

❍ 하천공사 비관리청 사업 협의완료(경상남도): 2022. 11.

❍ 삼천포천 생태하천 복원사업 공사 재개: 2023. 2.

❍ 삼천포천 생태하천 복원사업 2023년분 착공 : 2023. 10.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 하천유지수 확보 애로

❍ 하천유지수의 확보를 위한 대안으로 우선적으로 용강배수지 인근 관정을 설치하여 지하수 및 지표수를 배수지에 저류하는 방안 마련

향후 추진계획

❍ 사업 준공: 2025. 12.

연도별 달성목표

세부사업명	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후	비고
추진율(누계)	50%	100%
삼천포천 생태하천 복원사업	생태하천 복원 L=3.0km	생태하천 복원 L=1.4km 공사 준공