5-13	마을주차장(폐가, 공터 등) 조성사업

			관리번호		5-13
추진부서	건설과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	장경현 (3254)	담당자		박준성 (3255)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		21%

목    적

❍ 미관을 저해하는 폐가를 매입하거나 마을 내 공터를 활용한 주차공간을 마련함으로써 주민 생활 여건 개선

사업개요

❍ 위    치: 사천시 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2026년

❍ 사 업 량: 마을주차장 조성 14개소

❍ 총사업비: 2,600백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	2,600	0	2,600	680	630	630	660	0
국비
도비
시비	2,600	0	2,600	680	630	630	660
민자/기타

추진상황

❍ 대상지 현장 조사: 2022. 7.

❍ 실시설계 용역 및 감정평가: 2023. 1.

❍ 보상금 지급: 2023. 3.

❍ 지장물 철거용역 완료(신치): 2023. 4.

❍ 실시설계 용역 완료(가천): 2023. 5.

❍ 사업 준공(구평): 2023. 6.

❍ 사업 준공(가천): 2023. 9.

❍ 사업 준공(신치): 2023. 12.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 편입토지 보상 및 지장물 철거 등 공사비 과다 소요

-‘농촌생활환경 정비사업(전환사업-시군구 자율편성)’과 병행 추진

향후 추진계획

❍ 실시설계 용역 시행(사주1리, 중향): 2024. 1.

연도별 달성목표

세부사업명	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후	비고
추진율(누계)	20%	40%	70%	100%	-
개소수	3개소	2개소	5개소	4개소	-
마을주차장 조성사업	가천(사남) 구평(서포) 신치(선구)	사주1리(읍) 중향(향촌)	수청(정동) 우티(곤양) 연평(곤명) 동서(동서) 용강(벌용)	덕곡(용현) 예동(축동) 금성(곤명) 사촌(송포)	-