5-14	저수지 및 소류지 둘레길 공원화 사업

			관리번호		5-14
추진부서	건설과	협조부서
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	장경현 (3254)	담당자		강호중 (3251)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		71%

목    적

❍ 저수지 둘레길 공원화를 통한 시민의 휴식과 여가공간을 제공하고 시민과 탐방객들에게 다양한 볼거리와 자연체험 학습의 기회 제공

사업개요

❍ 위    치: 정동면, 사남면, 서포면, 향촌동

❍ 사업기간: 2019년 ~ 2026년

❍ 사 업 량: 저수지 친구공간 조성 14개소

- 기조성(8): 두량, 금곡전, 초전, 지내, 온정, 용치, 와룡, 가마실

- 추진중(3): 석계하, 대곡, 구룡

- 향후계획(3): 봉전, 침곡, 염전

❍ 사 업비: 4,230백만 원(기투자 2,030 / 임기내 2,200)

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	4,230	2,030	2,200	550	600	500	550	0
국비
도비
시비	4,230	2,030	2,200	550	600	500	550
민자/기타

추진상황

❍ 2027 사천시 중장기 발전 전략사업(S-100)선정: 2018. 9.

❍ 저수지 둘레길 조성사업 추진: 2019. 1.

- 용치(2019.~2022.) / 석계하(2021.~2023.) / 가마실(2022.)

❍ 사업 추진을 위한 주민 및 관계기관 협의: 2023. 2.

❍ 토지 감정평가 및 보상 협의: 2023. 2.

❍ 주민설명회(구룡저수지) 개최: 2023. 3.

❍ 사업 완료(대곡저수지): 2023. 4.

❍ 실시설계 용역 완료(구룡저수지): 2023. 5.

❍ 편입부지 사용 동의 등 협의(구룡저수지): 2023. 5.

❍ 사업 준공(석계하저수지): 2023. 6.

❍ 사업 구간 변경(구룡저수지): 2023. 10.

❍ 사업 착수(구룡저수지): 2023. 12.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 2024년도 사업대상지 편입토지 보상 등 사업비 과다 소요

- 추가경정 예산 편성 등 확보 후 추진

향후 추진계획

❍ 사업 준공(구룡저수지): 2024. 6.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	50%	70%	80%	90%	100%	-
저수지 둘레길 공원화 사업	용치	대곡	봉전		염전	-
	석계하
	가마실	구룡		침곡