5-15	시도1호선 확장공사 우선시행

			관리번호		5-15
추진부서	도로과	협조부서
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기후	팀 장	박용국 (3379)	담당자		김도훈 (3375)
임기 중 목표	추진중(85%)	추진상황	정상추진	추진율		25%

목    적

❍ 효율적이고 체계적인 도로계획의 기틀 마련 및 기반시설 확충

❍ 주민숙원사업 해소로 인한 행정 신뢰성 향상

사업개요

❍ 위    치: 사천시 사남면 일원

❍ 사업기간: 2019년 ~ 2026년

❍ 사업내용: 도로 확·포장 L=980m, B=20m

❍ 사 업 비: 22,000백만 원

[공사비 67억 원, 보상비 142억 원, 설계비 8억 원, 기타(철거, 폐기물 등) 3억 원]

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	22,000	8,800	13,200	3,000	3,000	3,000	4,200	0
국비 (주한미군)	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-
시비	21,000	8,800	12,200	2,000	3000	3,000	4,200	-

추진상황

❍ 실시설계 완료: 2020.  8.

❍ 도로구역 결정(LIG앞 사거리~병둔사거리): 2021.  7.

❍ 실시설계(보완) 추진[상수관로 반영]: 2022. 7.

❍ 손실보상 협의(계속): 2022. 8.

❍ 지장가옥 철거공사(계속): 2022. 10.

❍ 손실보상협의(재감정평가): 2023. 10.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 토지소유자들의 집단적 보상단가 불만(토지수용에 따른 사업 장기화)

⇒ 토지소유자 집단적 보상가 불만에 대한 대책 수립 필요(사업구역 조정 및 조기예산 확보에 따른 수용재결 추진)

향후 추진계획

❍ 손실보상 협의(계속): 2024. 1.

❍ 공사 착공(총괄분): 2025. 1.

❍ 공사 준공(총괄분): 2026. 12.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	30%	40%	55%	70%	85%	100%
시도1호선 확장공사 우선시행	보상협의 및 지장가옥 철거	보상협의 및 지장가옥 철거	도로 확·포장	도로 확·포장	도로 확·포장	도로 확·포장