5-16	사남~정동 간 국도대체우회도로 건설

			관리번호		5-16
추진부서	도로과	협조부서	부산지방국토관리청 도로계획과
사업성격	계속	사업주체	국가(부산지방국토관리청)
완료시기	임기후	팀 장	박용국 (3379)	담당자		김도훈 (3375)
임기 중 목표	추진중(70%)	추진상황	정상추진	추진율		25%

목    적

❍ 국도3호선의 상습교통 정체에 따른 대체 우회도로 개설 필요성 대두

❍ 국가항공산단 및 기존 산단 물류수공 및 국가항공산업발전에 기여

사업개요

❍ 위    치: 사천시 사남면 월성리 ~ 정동면 대곡리

❍ 사업기간: 2019년 ~ 2027년

❍ 사업내용: 국도대체우회도로 신설 L=3.9㎞, B=20m

❍ 사 업 비: 136,000백만 원

❍ 사업주체: 부산지방국토관리청(도로계획과)

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	136,000	1,700	134,300		50,000	50,000	20,000	14,300
국비	136,000	1,700	134,300		50,000	50,000	20,000	14,300
시비			0					-

추진상황

❍ 제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획 의견서 제출: 2018. 11.

❍ 현장확인(국토연구원, 경상남도, 용역사): 2019. 5.

❍ 일괄예타조사 대상지 선정: 2020. 1.

❍ 제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획 수립 반영: 2020. 12.

❍ 제5차 국도·국지도 건설 5개년 최종 선정: 2021. 8.

❍ 전략환경영향평가(초안) 및 노선계획(안) 주민설명회: 2022. 8.

❍ 사남면 이장단 간담회: 2022. 10.

❍ 주민설명회(사남면, 정동면 및 이해관계인): 2022. 11.

❍ 노선(안) 협의: 2023. 5.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 주민들의 노선 변경, 마을 진입로 설치 및 교차로 형식 변경 요구 등 민원발생

⇒ 예비타당성조사 검토된 사업비에 비해 15%초과시 예비타당성조사 재검토 대상이 되며, 낮은 B/C로 인하여 사업무산 우려

⇒ 사업비 증가로 재검토 대상이 되지 않도록 사업내용(입체교차로 형식, 차로 등) 조정 시행

향후 추진계획

❍ 실시설계 완료: 2024. 6.

❍ 행정절차 및 보상협의: 2024. 7.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	30%	50%	70%	100%
사남~정동 간 국도대체우회도로 건설	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	행정절차 및 보상협의	도로 건설	도로 건설	도로 건설