5-19	회전교차로 설치(사남KCC 외 5개소)

			관리번호		5-19
추진부서	도로과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	강민구 (3384)	담당자		김민동 (3381)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		30%

목    적

❍ 회전교차로의 설치하여 교통안전과 원활한 교통소통 도모

❍ 교통사고 예방 및 교통 운영체계 선진화

사업개요

❍ 위    치: 사천시 동금동 143번지 외 1개소

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2024년

❍ 사업내용: 회전교차로 설치 2개소

- 동금사거리 1개소, 중앙여중 앞 1개소

❍ 사 업 비: 1,100백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	1,100		1,100	500	600	-	-	-
국비
도비
시비	1,100		1,100	500	600	-	-	-
민자/기타

추진상황

❍ 기본계획수립 용역 시행: 2022. 8.

❍ 2023년 당초예산편성 요구: 2022. 8.

❍ 회전교차로 추진계획 보고: 2022. 10.

❍ 실시설계용역 시행(동금사거리): 2023. 4.

❍ 실시계획인가 신청 : 2023. 7.

❍ 공사 시행 : 2023. 10.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당없음

향후 추진계획

❍ 제1회 추경예산 확보(중앙여중 앞) : 2024. 3.

❍ 공사 준공(동금사거리): 2024. 4.

❍ 실시설계용역 시행(중앙여중 앞): 2024. 4.

❍ 공사 착공(중앙여중 앞): 2024. 7.

❍ 공사 준공(중앙여중 앞): 2024. 12.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	50%	100%
회전교차로 설치	회전교차로 기본계획 용역시행	동금사거리 회전교차로 설치	중앙여중 앞 회전교차로 설치