5-21	서포~곤명 간(국지도58호선) 도로 확장

			관리번호		5-21
추진부서	도로과	협조부서	부산지방국토관리청 도로계획과 경상남도
사업성격	계속	사업주체	부산지방국토관리청
완료시기	임기후	팀 장	박용국 (3379)	담당자		김도훈 (3375)
임기 중 목표	추진중(80%)	추진상황	정상추진	추진율		35%

목    적

❍ 기존 국지도58호선 선형이 불량하고, 도로 폭원이 협소하여 교통사고 발생이 빈번하므로 지역주민 안전 및 교통편의를 위해 국지도58호선 개발사업 조속 추진 필요

사업개요

❍ 위    치: 사천시 서포면 ~ 곤양면 ~ 곤명면 일원

❍ 사업기간: 2019년 ~ 2027년

❍ 사업내용: 2차로 시설개량 L=13.2km, B=10.0m

❍ 사 업 비: 82,100백만 원[곤양~서포: 363억원, 곤양~곤명: 458억원]

❍ 사업주체: 부산지방국토관리청(도로계획과)

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	82,100	5,700	76,400	400	40,000	20,000	16,000	0
국비	82,100	5,700	76,400	400	40,000	20,000	16,000
시비	0		0					-

추진상황

❍ 국지도58호선 혼잡구간 우회도로 개설 건의: 2019. 1.

❍ 기본 및 실시설계 용역(곤양~서포) 착수: 2019. 12.

❍ 부산지방국토관리청 방문 협의: 2020.  6.

❍ 주민설명회 개최(곤양면, 서포면): 2020.  7.

❍ 기본 및 실시설계용역(곤양~곤명) 착수: 2020. 11.

❍ 기본설계 설계자문(곤양~곤명): 2021. 11.

❍ 관련기관 협의요청(부산지방국토관리청→사천시): 2022. 11.

❍ 실시설계용역 준공: 2023. 7.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 종점부(곤명 봉계) 선형 변경에 따른 토지소유자 보상협의 애로

⇒ 적극적 보상협의 및 토지수용 절차 병행

향후 추진계획

❍ 행정절차(도로구역 결정): 2024. 1.

❍ 공사 착공 및 보상협의 : 2024.  1.

❍ 공사 준공: 2027. 12.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	40%	60%	80%	100%
서포~곤명 간 국지도(58호선) 도로 확장	기본 및 실시설계	실시설계, 행정절차 및 보상협의	도로 확장	도로 확장	도로 확장	도로 확장