5-22	송포~실안 간 해안일주 연결도로 개설

			관리번호		5-22
추진부서	도로과	협조부서	해양수산과
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	박용국 (3379)	담당자		김태원 (3377)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		20%

목    적

❍ 기존 국도선형이 불량하고, 폭원이 협소하여 교통사고 발생이 빈번하므로 지역주민 안전 및 교통편의를 위해 국지도58호선 개량사업 조속 추진 필요

사업개요

❍ 위    치: 사천시 남양동 송포농공단지 ~ 동서동 산분령 일원

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2026년

❍ 사업내용: 해안도로 확포장 L=4.4km, B=8m

┌ 1단계: 송포농공단지 ~ 모충공원 L=2km

├ 2단계: 모충공원 ~ 광포항 L=0.7km

└ 3단계: 광포항 ~ 산분령항 L=1.7km

❍ 사 업 비: 15,000백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	15,000	250	14,750	300	4,500	5,000	4,950	0
국비	13,450	200	13,250	300	3,000	5,000	4,950	-
시비	1,550	50	1,500		1,500	-	-	-

추진상황

❍ 민선8기 공약사업 선정: 2022.  7.

❍ 기본설계용역 착수: 2022. 11.

❍ 기본설계용역 완료: 2023. 5.

❍ 실시설계용역(카페거리) 착수: 2023. 6.

❍ 실시설계용역(카페거리) 완료: 2023. 8.

❍ 일상감사 및 계약심사 의뢰: 2023. 9.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 일부구간 공유수면 매립기본계획 반영 등 행정절차에 많은 시일 소요

⇒ 실시설계 추진 시 사전영향평가 및 공유수면매립 등 관련 행정사항을 사전에 검토하여 행정절차 기간 최소화 및 구간별 사업추진

향후 추진계획

❍ (2단계)공사 착공: 2024. 1.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	40%	70%	100%
송포~실안 간 해안일주연결도로 개설	기본설계	실시설계	2단계 도로확포장	1단계 도로확포장	3단계 도로확포장