5-23	사천읍~진주역 국도33호선 우회도로 개설

			관리번호		5-23
추진부서	도로과	협조부서	부산지방국토관리청 도로계획과 진주시 도로과
사업성격	신규	사업주체	국가(부산지방국토관리청 도로계획과)
완료시기	임기후	팀 장	박용국 (3379)	담당자		김도훈 (3375)
임기 중 목표	추진중(20%)	추진상황	정상추진	추진율		20%

목    적

❍ 국도3호선, 33호선 사천읍 구암리 ~ 진주시 정촌면 구간은 상습정체구간으로, 현재 부산지방국토관리청에서 추진 중인 『사남~정동 간 국도대체우회도로 건설사업』 이후 국도3호선 배춘삼거리 병목현상 발생 우려

❍ 국도3호선과 분리한 33호선의 우회도로망 체계를 구축하여 원활한 교통처리와 낙후된 서부경남의 지역경제 활성화 기여

사업개요

❍ 위    치: 사천시 사천읍 구암리 ~ 진주시 정촌면 화개리

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2034년

❍ 사업내용: 도로개설 L=6.08㎞, B=20m

❍ 사 업 비: 2,080억 원

❍ 사업주체: 부산지방국토관리청(도로계획과)

추진상황

❍ 제5차 국도·국지도 5개년 계획 반영 건의: 2018.  1.

❍ 도로망 구상(보완) 용역 시행(진주시): 2019. 12.

❍ 제6차 국도·국지도 5개년 계획 수요 제출: 2023.  3.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 『제6차 국도·국지도 5개년 계획』에 사업대상지 반영 필요

⇒ 진주시 연계협력 및 해당 중앙부처 지속적 방문을 통하여 『제6차 국도·국지도 5개년 계획』반영될 수 있도록 지속적 건의

향후 추진계획

❍ 『제6차 국도·국지도 5개년 계획』사업 건의: 2024. 1.

❍ 『제6차 국도·국지도 5개년 계획』일괄예타 대상지 선정: 2025. 1.

❍ 예타결과 발표(기재부): 2025. 8.

❍ 사업 추진: 2026. 1.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	10%	10%	20%	100%
사천읍~진주역 국도33호선 우회도로 개설	사전타당성조사용역	사전타당성조사용역 및 반영 건의	반영 건의 및 일괄예타 대상지 선정	예타결과 발표 (기재부)	행정절차 및 보상협의	도로 건설