5-28	도시가스 공급사업 지원금 확대

			관리번호		5-28
추진부서	지역경제과	협조부서	-
사업성격	계속	사업주체	민간((주)지에스이)
완료시기	임기내	팀 장	김성훈 (3069)	담당자		안성현 (3065)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		15%

목    적

❍ 도시가스 공급관로 설치 경제성 미달지역 시설분담금 지원

❍ 도시가스 공급지역 확대 및 가정 연료비 절감

사업개요

❍ 위    치: 사천시 일원

❍ 사업기간: 2019년 ~ 2026년

❍ 사업내용

- 공급세대수: 1,000세대(도시가스 보급률 69% ⇒ 75% 목표)

- 도시가스 공급 배관 매설 연장: 12km

❍ 사 업 비: 25,145백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	25,145	17,804	7,341	2,241	1,700	1,700	1,700
국비
도비	2,474	1,951	523	223	100	100	100
시비	11,871	5,053	6,818	2,018	1,600	1,600	1,600
민자/기타	10,800	10,800

추진상황

❍ 도시가스 행정절차 신속성을 위한 조례 개정: 2022. 12.

- 당초: 매년 초 지원계획 수립 → 당해 하반기 착공(수요조사, 타당성 검토 등 기간 소요)

- 개정: 사업 시행 전 계획 수립 → 전년도 계획수립 및 당해년도 1월 착공 가능

❍ 2023년 사업 신청지 선정을 위한 수요조사 실시: 2022. 9.

❍ 신청지역(9개소) 타당성 검토: 2022. 11.

❍ 타당성 검토 완료에 따른 보조금 지원 대상지 확정: 2022. 12.

- 5개 지역(신규 3, 연차 2)

❍ 2024년 사업 신청지 접수: 2023. 5.

❍ 2022년 이월사업 준공 완료: 2023. 6.

❍ 2024년 사업 신청지(9개소) 타당성 조사: 2023. 6.

❍ 2024년 사업 보조금 지원 대상지 확정: 2023. 9.

❍ ｢사천시 단독주택 등 도시가스 공급사업 지원 조례｣ 개정(상업시설 확대): 2023. 10월

❍ 2024년 사업수행계획서 접수: 2023. 12월

추진상 애로사항 및 대책

❍ 보조사업과 관내 아파트 조성 등 보조사업 외 도시가스 공사 수요 발생 시 공사 지연이 우려되나 보조사업 우선 시행 추진 협의

❍ 타 부서 공사(상･하수도 공사 등) 예정 시 부서 간 협의를 통해 공사 기간 조율

향후 추진계획

❍ 사업시행 및 착공: 2024. 1월

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	25%	50%	75%	100%
도시가스확대	50세대	200세대	500세대	750세대	1000세대