5-3	노산공원과 목섬을 잇는 무지개다리 건립

			관리번호		5-3
추진부서	해양수산과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	조현범 (3129)	담당자		강민승 (3125)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		30%

목    적

❍ 노산공원 및 팔포음식특화단지 등을 방문하는 방문객들의 볼거리      부족으로 볼거리 제공 및 관광객 유치

사업개요

❍ 위    치: 사천시 서금동 147-1번지 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2025년

❍ 사업내용: 보도교 설치(L=120m) 및 경관조명 1식

❍ ❍ 사 업 비: 6,700백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	6,700	0	6,700	158	2,075	4,467	0	-
국비	0	-	0	0	0	0	0	-
도비	0	-	0	0	0	0	0	-
시비	6,700	-	6,700	158	2,075	4,467	0	-
민자/기타	0	-	0	0	0	0	0	-

추진상황

❍ 제4차 항만기본계획 고시(2021~2030): 2021. 12.

❍ 국회의원(하영제) 해수부 건의 자료 제출: 2022. 1.

❍ 지방 소멸 대응 발굴 자료 제출: 2022. 4.

❍ 사업추진계획 방침 결정: 2023. 1.

❍ 사업비 확보 관련 해수부 및 경남도 협의, 일상감사 및 계약심사 : 2023. 2.

❍ 보행자 교량 견학(창원시, 거제시): 2023. 3.

❍ 용역 계약 및 착수: 2023. 4.

❍ 용역 착수보고: 2023. 5.

❍ 용역 중간보고: 2023. 9.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 전환사업으로 국·도비 지원 불투명하며, 사업비 과다(6,700백만 원) 소요에 따른 예산확보 애로

❍ 원활한 사업 추진을 위하여 국·도비 지원 지속 건의(해수부, 경남도)

향후 추진계획

❍ 용역 준공: 2024. 1.

❍ 해역이용협의(마산지방해양수산청): 2024. 1.

❍ 공사 착공: 2024.  2.

❍ 공사 준공: 2025. 12.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	-	30%	50%	100%
노산공원과 목섬을 잇는 무지개교 건립	-	실시설계용역 및 해역이용협의 (예산 건의)	예산확보 및 공사 착공	공사 준공