5-30	모충공원 정비사업 조기완공 [모충공원 공공파크골프장 조성)

			관리번호		5-30
추진부서	녹지공원과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	최성훈 (3419)	담당자		최성훈 (3419)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		40%

목    적

❍ 동적인 생활권 공원조성으로 공원이용 활성화 및 녹색 힐링공간 제공

❍ 실안관광상품과 연계한 체류형 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 도모

사업개요

□ 위    치: 사천시 송포동 산165-1번지 일원(모충공원)

□ 사업기간: 2023년 ~ 2024년

□  사업내용:  파크골프장(27홀), 관리동(354㎡,) 주차장(100면), 쉼터(833㎡),  관리도로(1.5km) 등

❍ 사 업 비: 9,300백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	9,300		9,300	1,300	8,000
국비	1,300		1,300	1,300
도비	2,400		2,400		2,400
시비	5,600		5,600		5,600
민자/기타

추진상황

❍ 공원조성계획 및 실시설계 용역: 2022. 12.

❍ 공원조성계획 시의회 의견청취: 2023. 2.

❍ 사천시 도시계획위원회 심의(조건부 승인): 2023. 4.

❍ 문화재 지표조사: 2023. 4.

❍ 경상남도 지방재정 투자심사위원회 심의(조건부 승인): 2023. 5.

❍ 공원조성계획(변경) 고시: 2023. 7.

❍ 실시계획인가(변경) 고시: 2023. 8.

❍ 사업(총괄분) 시행: 2023. 9.

❍ 공사착공: 2023. 11.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 행정절차 이행 지연에 따른 조기 착공 애로

향후 추진계획

❍ 공사준공: 2024. 11.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		40%	100%
모충공원 공공파크골프장 조성		실시설계용역 공사착공	공사준공