5-31	빛공원 조성

			관리번호		5-31
추진부서	녹지공원과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	최성훈 (3419)	담당자		김경환 (3416)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		50%

목    적

❍ 사천시의 대표적인 공원인 노산·수양공원에 관광수요 확대 및 야간 명소화를 이끌 수 있는 체류형 소비공간 조성

❍ 노산·수양공원 주변 경관과 조화를 이루는 야간조명 및 미디어 플랫폼 구축 등 최신기술 도입을 통해 야간 명소로 발돋움

사업개요

□ 위    치: 서금동 101-1번지 일원, 사천읍 선인리580-2번지 일원

□ 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 12.

□ 사업내용: 경관조명 설치 및 미디어 아트 하드웨어 구축 운영, 노후 데크로드 철거 및 교체(L=124m, B=2m) 등

❍ 사 업 비: 3,000백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	3,000		3,000	1,500	1,500
국비
도비
시비	3,000		3,000	1,500	1,500
민자/기타

추진상황

❍ 빛공원 조성 세부 계획 수립: 2022. 10. ~ 2023. 1.

❍ 노산 빛공원 데크정비사업 실시설계 용역 준공: 2023. 3.

❍ 2024년 발전소주변지역 특별지원사업 사업계획서 제출: 2023. 3.

❍ 노산 빛공원 데크정비사업 착공: 2023. 4.

❍ 노산 빛공원 야간조명 제작 및 설치 제안 공고(협상에 의한 계약): 2023. 4.

❍ 노산 빛공원 제안서 평가위원회 개최: 2023. 5.

❍ 노산 빛공원 협상 계약 체결 및 사업 추진: 2023. 6.

❍ 노산 빛공원 데크정비사업 준공: 2023. 10.

❍ 노산 빛공원 경관조명 설치사업 준공: 2023. 12.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 노산 빛공원 데크정비사업 바지크레인 접안 불가로 인해 기둥자재 변경 불가피(H형강→STS사각관)

❍ 수양 빛공원 조성을 위한 총사업비 15억 원 중 2024년 당초예산 3억 원 확보→부족분 2024. 3월 1회 추경 예산편성 요구

향후 추진계획

❍ 수양 빛공원 경관조명 설치사업 준공: 2024. 11.

❍ 시설물 유지관리: 2025. 1. ~

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		50%	100%
노산 빛공원 조성		노산 빛공원 조성	수양 빛공원 조성