5-32	어린이 체험 놀이공원 조성 [아이누리마당 조성)

			관리번호		5-32
추진부서	녹지공원과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	최성훈 (3419)	담당자		김경환 (3416)
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율		100%

목    적

❍ 도심지 내 아이들을 위한 놀이공간 조성으로 생활권 공원 활용도 극대화 및 저출산에 따른 지방소멸 위기 대응

❍ 살기좋은 ‘행복도시 사천’ 실천에 기여

사업개요

□ 위    치: 수양공원(사천읍 선인리 607번지), 망산공원(선구동 26-1번지), 사천케이블카 자연휴양림(실안동 산170-2번지), 벌리2어린이공원(용강동 562-1번지), 임내숲 어린이공원(죽림동 572-8번지) 일원

□ 사업기간: 2022. 7. ~ 2023. 12.

□ 사업내용

- 수양공원: 유아숲 체험놀이시설(징검다리 외) 11개소, 편의시설 4개소 등

- 망산공원: 유아숲 체험놀이시설(짚라인 외) 7개소, 편의시설 및 안내판 7개소 등

- 자연휴양림: 유아숲 체험놀이시설(모험놀이대 외) 17개소, 편의시설 및 안내판 17개소 등

- 벌리2어린이공원: 체험놀이시설 5개소, 산책로, 운동기구, 편의시설 및 조경식재 등

- 임내숲어린이공원: 숲속 모험놀이시설 10개소 등

❍ 사 업 비: 1,450백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	1,450		1,450	1,450
국비
도비	793		793	793
시비	657		657	657
민자/기타

추진상황

❍ 수양공원 유아숲체험원 준공: 2022. 8.

❍ 망산,자연휴양림 유아숲체험원 착공 및 준공: 2022. 8. ~2022. 12.

❍ 유아숲체험원 위탁 운영: 2022. 8. ~2023. 12.

❍ 아이누리마당 조성사업 실시설계 용역: 2023. 2.

❍ 아이누리마당 주민설명회(2회): 2023. 5.

❍ 공원조성계획 변경신청: 2023. 6.

❍ 공원조성계획 변경 및 실시계획 인가 고시: 2023. 8.

❍ 벌리2어린이공원 및 임내숲 놀이공원 조성사업 착공: 2023. 9.

❍ 벌리2어린이공원 및 임내숲 놀이공원 조성사업 준공: 2023. 12.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 애로사항

- 벌리2어린이공원 진입을 위한 용강동 545-7번지 등 장기미집행 도시계획도로(소로) 실효로 인해 진입로 미확보 및 주차공간 부족

❍ 대책

- 공원이용객의 편의 및 원활한 공사 추진을 위해 사유지 매입 또는 소유자 사용협의 후 진입로 및 주차장 조성 추진

- 토지매입비 예산편성 건의

향후 추진계획

❍ 시설물 유지관리: 2024. 1. ~

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		100%
아이누리마당 조성		아이누리마당 조성