5-8	상가 주변 주차장 확보사업 추진

			관리번호		5-8
추진부서	교통행정과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	이만종 (3369)	담당자		이민상 (3366)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		50%

목    적

❍ 상가 주변 주차장 확보로 관광객 및 시민들의 주차난 개선

사업개요

❍ 위    치: 사천시 서금동 146, 146-3

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2026년 (5년간)

❍ 사업내용: 노외주차장 조성 A=6,070㎡(주차면수 대형 9, 소형 134)

❍ 사 업 비: 11,800백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2023 상반기	2023 하반기	2024	2025	2026 상반기
계	11,800	57	11,743	-	5,130	713	5,200	700	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	5,900	57	5,843	-	2,565	328	2,600	350	-
시비	5,900	-	5,900	-	2,565	385	2,600	350	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 지방재정투자심사 완료: 2022. 2.

❍ 실시설계용역 준공: 2022. 10.

❍ 토지분할 및 감정평가 : 2023. 2.

❍ 보상협의 완료: 2023. 7.

❍ 지방재정투자 심시 의뢰 : 2023. 12.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 공사 시 잔여부지 매수계획 반영하여 공사

❍ 잔여부지 주차환경개선지원사업 사업비 확보

향후 추진계획

❍ 주차환경개선 지원사업 공모신청(경상남도) : 2024. 7.

❍ 공사착공: 2026. 2.

❍ 공사준공: 2026. 6.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	20%	50%	60%	85%	100%
팔포 공영주차장 조성사업	지방재정투자심사 등	공영주차장 조성사업	지방재정투자심사 공유재산 심의 등	공사착공	공사준공