5-9	발전소 우회도로 조기 완공

			관리번호		5-9
추진부서	도 시 과	협조부서	-
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	강영실 (3169)	담당자		최호준 (3165)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		50%

목    적

❍ 서부 경남 산업단지 개발 및 수요증가에 대비한 일반상업 유통상업 인프라 구축과 폐고속도로 토지이용제고로 지역경기 부양 거점 확보

❍ 사천시 관문 경관 조성 및 토지이용 효율성 증대

사업개요

❍ 위    치: 사천시 좌룡동~향촌동

❍ 사업기간: 2019년 ~ 2026년

❍ 사 업 량: 도로개설 L=4,300m, B=18.0m

❍ 사 업 비: 61,600백만 원(공사비 24,600, 보상비 37,000)

※ LH와 토지공급계약 체결에 따른 분할 상환금 납부(2026년까지)

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	61,600	16,700	44,900	16,500	12,100	6,500	9,800
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
시비	37,000	7,700	29,300	6,500	6,500	6,500	9,800
민자/기타	24,600	9,000	15,600	10,000	5,600	0	0

추진상황

❍ 화력발전소 우회도로 개설사업 추진계획 수립: 2018. 9.

❍ 화력발전소 우회도로 개설 협약(사천시, 고성그린파워(주)]: 2019. 12.

- 우회도로 개설 L=4,300m, B=18.0(보상: 사천시, 공사: 고성그린파워(주))

❍ 2020년도 공공토지비축 신청(국토교통부, LH): 2019. 12.

❍ 2020 공공토지비축 대상 확정: 2020. 6.

❍ 도시계획시설사업 실시계획 인가: 2020. 6.

❍ 토지은행제 업무 협약 체결(사천시, LH): 2020. 8.

❍ 비축사업계획 승인 고시(국토교통부 고시 제2020-221호): 2020. 10.

❍ 보상계획 및 열람공고: 2021. 2.

❍ 수용재결 신청(LH→중앙토지수용위원회): 2022. 1.

❍ 재결 완료(중앙토지수용위원회): 2022. 8.

❍ 수용개시(LH, 공탁금 지급) : 2022. 10.

❍ 공사 입찰 공고(고성그린파워(주)): 2022. 12.

❍ 공사 계약(고성그린파워(주) ↔ ㈜케이디):2023. 1.

❍ 가설건축물 축조 신고 완료(현장사무실): 2023. 2.

❍ 건설사업관리용역 계약 체결: 2023. 3.

❍ 실 공사 착공: 2023. 4.

❍ 화력발전소 우회도로 개설공사 설명회 개최: 2023. 5.

❍ 부서 및 주민의견 검토 요청(사천시→고성그린파워(주)): 2023. 6.

- 삼천포천교, 봉남천교 교량 재검토, 용배수로 공급, 교차로 형식 변경

❍ 부서 및 주민의견 검토 회신(고성그린파워(주)→사천시): 2023. 7.

❍ 합동회의 실시(3차) - 용배수로 설치 관련(사업반영 건의): 2023. 8.

❍ 향촌동 주민설명회 개최[향촌동장, 당진마을 통장 외 6명]: 2023. 10.

❍ 설계변경 관련 합동회의 개최[시, GGP, 감리단, 시공사]: 2023. 10.

❍ 삼천포천교, 봉남천교 교량 변경설계 완료: 2023. 12.

추진상 애로사항 및 대책

❍ (문제점) LH와 토지공급계약을 체결하여 LH에서 선 보상을 하고 우리 시에서 매년 65억원 분할 납부함에 따라 우회도로와 연계된 도시계획도로(대로) 개설사업에 예산투입 애로

❍ (대  책) 특별교부세, 토지은행제 등을 적극 활용하여 재원확보 노력

향후 추진계획

❍ 공사 준공[고성그린파워(주)] : 2025. 12.

❍ 시설물 인계[고성그린파워(주)→사천시] :2026. 3.

❍ 공공개발용 토지 매매대금 납부 완료: 2026. 6.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	30%	50%	70%	90%	100%	100%
발전소 우회도로 조기 완공	보상 완료	공사 착공	공사 추진	공사 준공	시설물 인계	사업 시행