6-2	사천시립도서관 완공

			관리번호		6-2
추진부서	평생학습센터	협조부서	도시재생과 공공시설팀
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	강윤남 (2594)	담당자		이정갑 (2591)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		90%

사업개요

❍ 위    치: 사천시 정동면 예수리 552-2번지(반룡공원 내)

❍ 사업기간: 2019. 1. ~ 2024. 5.

❍ 사업내용: 공공도서관 1동

- 대지면적 7,654㎡, 연면적 5,270㎡, 지상1층~4층

❍ 사 업 비: 25,832백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내					임기후
			소계	2023	2024	2025	2026 상반기
계	25,832	20,252	5,580	5,580	-	-	-	-
국비	4,722	4,722	0	0	-	-	-	-
도비	2,440	0	2,440	2,440	-	-	-
시비	18,670	15,530	3,140	3,140	-	-	-	-
민자/기타	0	0	0	0	-	-	-	-

추진상황

❍ 문체부 타당성 검토결과 통보(적정): 2019. 3.

❍ 경남도 지방재정투자 심사 승인(조건부): 2019. 6.

❍ 사천시립도서관 운영 기본계획 수립: 2019.10.

❍ 설계 공모 당선작 선정: 2020. 9.

❍ 기본 및 실시설계 및 문화재 시□발굴조사 용역 준공: 2021. 12.

❍ 공사 착수: 2022.  2.

❍ 진입로 확장공사 손실보상 협의 추진: 2022. 12.

❍ 건립공사 공사기간 연장 시행: 2023. 7.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 건축 및 인테리어 공사기간 연장에 따른 운영준비 과업 일정 조정

❍「도서관법」개정에 따라 공공도서관 등록제 이행을 위한 사서 인력 충원

향후 추진계획

❍ 공사 준공: 2024. 1.

❍ 운영준비 및 시범운영: 2024. 1. ~ 2024. 4.

❍ 개관 및 정상운영: 2024. 5.

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	50%	90%	100%
사천시립 도서관 완공	공사추진	시립도서관 완공	시립도서관 개관