2-10	항공MRO 산업단지 조기 완공

			관리번호		2-10
추진부서	투자유치산단과	협조부서	경상남도 우주항공산업과
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	배명희 (3469)	담당자		김수언 (3465)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		50%

목    적

❍ 항공선도기업인 KAI·KAEMS 인접 지역에 항공 MRO 단지 조성으로 연구개발·생산·MRO가 일괄된 항공산업 클러스터 조성

사업개요

❍ 위    치: 사천시 사천읍 용당리 일원

❍ 사업기간: 2017 ~ 2025년

❍ 사업내용: 산업단지 조성 299,765㎡

- 1,2단계 149,628㎡, 3단계 150,137㎡

❍ 사 업 비: 175,910백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	175,910	100,000	75,910	25,500	21,000	7,100	22,310	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	70,364	40,000	30,364	10,500	6,000	7,100	6,764	-	-
시비	105,546	60,000	45,546	15,000	15,000	-	15,546	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2014. 12.: 항공정비사업(MRO) MOU 체결(경상남도, 사천시, KAI)

❍ 2018.  4.: 2018년 제1차 지방재정 중앙투자심사(조건부/120,000㎡, 430억)

❍ 2018. 12.: 산업단지계획 승인 및 고시(1, 2단계/149,424㎡)

❍ 2019.  3.: 2019년 제1차 지방재정 중앙 투자심사(조건부/149,424㎡, 951억)

❍ 2019.  6.: 1, 2단계 공사 착공

❍ 2019. 11.: 산업단지계획 변경 승인 고시(149,424→149,628㎡)

❍ 2019. 12.: 공사 준공(1단계 1차분)

❍ 2020.  6.: 1단계 개발토지 임대계약 체결(사천시, KAEMS)

❍ 2020. 11.: 타당성 재조사(한국지방행정연구원)

❍ 2021.  2.: 2021년 제1차 지방재정 중앙투자심사(조건부/311,880㎡ 1,480억)

❍ 2022.  5.: 경상남도지방산업단지계획 심의(조건부 가결)

❍ 2022.  6.: 산업단지계획(변경) 승인 및 고시(1,2,3단계)(149,628→299,765㎡)

❍ 2022.  7.: 경상남도지방건설기술심의(경남도)

❍ 2022. 11.: 산업단지계획(변경) 합동설명회 개최(환경, 교통, 재해 등)

❍ 2022. 12.: 경상남도지방토지수용위원회 심의(토지: 28필지, 지장물: 605건)

- 수용개시: 2023. 2. 17.

❍ 2023.  1.:경상남도지방토지수용위원회 심의(토지 5필지)

- 수용개시: 2023. 3. 24.

❍ 2023.  2.: 3단계 공사 계약(총괄분, 1차분)

❍ 2023.  2.: 3단계 공사 착공(1차분, 8,461백만 원)

❍ 2023.  3.: 도비 추가 지원 건의(경남도 항공우주산업과)

❍ 2023.  3.: 경상남도지방산업단지계획심의위원회 심의(조건부 가결)

❍ 2023.  4.: 도비 추가 지원 건의(경남도 항공우주산업과 2차)

- 도비 추가지원 계획: 2024~2025년에 도비 103억 원 지원 예정

❍ 2023.  5.: 일반산업단지계획 변경 승인 및 지형도면 고시

❍ 2023.  9.: 해안도로변 발굴(정밀)조사 부분완료 승인

❍ 2023.  9.: 1단계 공공청사용지 매매계약서 체결(경남경찰청)

❍ 2023.  9.: 공사착공(1단계 4차분)

❍ 2023. 10.: 용당2리 이주단지 발굴조사 완료 승인

❍ 2024.  1.  1.: 3단계 개발토지 임대계약 체결(사천시, KAI)

- 격납고, 유도로 사용 계획, 33,146.76㎡

❍ 2024.  6.  3.: 2단계 개발토지 임대계약 체결(사천시, KAEMS)

- 회전익(헬기) 부지 사용 계획, 14,430㎡

추진상 애로사항 및 대책

❍ 용당2리 이주 지연에 따른 후속 공정 추진 지연

- 이주 독려 및 명도소송 등 검토로 2024년 9월 이전 주거이전 완료 예정

향후 추진계획

❍ 2024. 12.: 1,2단계 공사 준공

❍ 2025. 12.: 사업 준공(총괄)

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	35%	40%	80%	100%
항공MRO 산업단지 조기 완공	-용지 보상(1,3단계) -산업단지(1단계) 조성 추진 -이주단지(용당1리) 조성 추진	-용당1리 이주 완료 -산업단지(1단계) 조성 추진 -산업단지(3단계) 착공 및 조성 추진 -이주단지(용당2리) 조성 추진	-산업단지(1단계) 조성 완료 -산업단지(3단계) 조성 추진 -용당2리 이주 완료	산업단지 완공