2-2	우주산업클러스터 구축

			관리번호		2-2
추진부서	우주항공과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	경상남도(경남테크노파크)
완료시기	임기내	팀 장	윤현찬 (3494)	담당자		류호철 (3496)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		20%

목    적

❍ 뉴-스페이스 시대 우주항공산업 거점도시 도약

사업개요

❍ 사 업 명: 우주산업클러스터 위성개발혁신센터 구축사업

❍ 사업기간: 2024년 ~ 2026년

❍ 위    치: 경남항공국가산업단지 내(미정)

❍ 사업내용: 위성 개발ㆍ제조를 위한 공용장비 및 시설 구축ㆍ운영, 스타트업 육성, 전문인력 양성 지원 등을 위한 위성개발 종합지원 센터 구축

❍ 사 업 비: 39,400백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	39,400	-	39,400	-	-	3,700	26,200	9,500	-
국비	10,120	-	10,120	-	-	1,000	5,050	4,070	-
지방비	29,280	-	29,280	-	-	2,700	21,150	5,430	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-		-	-

추진상황

❍ 2022.  8.  4.: 우주산업클러스터 참여의향서 및 사업계획서 제출

❍ 2022. 12. 21.: 우주산업클러스터 위성특화지구 지정

❍ 2023.  4. 27.: 위성개발혁신센터 예산요구서 제출

❍ 2023.  5.  4.: 과기부 주재, 점검회의 및 사업계획 발표

❍ 2023.  5. 11.: 위성개발혁신센터 국가연구개발사업 예산 설명회

❍ 2023.  6. 19.: 과기부 예산안 과기혁신본부 예산심의(적정 통과)

❍ 2023.   8. 21.: 예타면제 및 예산적정성 검토 결정 예산심의

❍ 2023.  9. ~ 2024.  6.: 한국과학기술평가원 사업적정성 검토

❍ 2024.  6.: 예타면제 및 예산적정성 검토 결정 이의신청

추진상 애로사항 및 대책

❍ 예산적정성 검토 절차 신설로 사업 지연

- 적정성 검토 결과 도출 즉시 추진할 수 있도록 사전 준비

향후 추진계획

❍ 2024.  7.: 사업 투자심사 신청

❍ 2024.  8.: 업무협약(과기부-경남도-사천시-경남테크노파크)

❍ 2024. 하반기: 기본 및 실시 설계

❍ 2025. ~ 2026.: 건축공사, 시설장비 구입 및 준공

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	30%	60%	100%	100%
위성개발혁신센터 구축	사업기획	사업기획 및 과기부 협의	설계 및 부지확보	건축 및 장비구축	건축 및 장비구축	운영