2-7	자율주행 모빌리티 허브 구축 지원

			관리번호		2-7
추진부서	우주항공과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	황현준 (3484)	담당자		공동섭 (3485)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		50%

목    적

❍ 미래 모빌리티 변화에 선제적으로 대응하고 자율주행산업의 육성 및 실증 환경 조성에 기여

사업개요

❍ 위    치: 사천시 용현면 선진리 1113번지 일원

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2026년

❍ 사업내용: 자율주행 모빌리티 허브 구축 지원

- 4차산업(자율주행산업 등) 육성 관련 조례 제정

- 자율주행자동차 시범운행지구 지정 신청(시→경상남도→국토교통부)

- 자율주행 셔틀 시범운행 추진

- 자율주행 모빌리티 생산공장 및 연구·시험시설 구축 행정 지원

(인허가 지원, 기업 애로사항 청취 및 해소, 규제혁신 과제 발굴 등)

❍ 사 업 비: 비예산

추진상황

❍ 2022.  1.: 자율주행 분야 전문기업 ㈜스프링클라우드 투자유치

- (투자금액) 800억 원 / (고용인원) 105명 / (사업장면적) 96,753.7㎡

❍ 2022.  9.: 자율주행 모빌리티 허브 구축 관계기관 실무회의(1차)

- (참여기관) 사천시, 산업단지공단, 기업 / (주요내용) 세부투자계획 수립 논의

❍ 2022. 11.: 자율주행 모빌리티 셔틀 운행 지역(여수) 현지실사

- (운행구간) 여수엑스포해양공원 3.4㎞ 구간 / (운행업체) ㈜스프링클라우드 / (운행개시) 2022. 4.

❍ 2023.  2.: 자율주행 모빌리티 허브 구축 관계기관 실무회의(2차)

- (참여기관) 사천시, 산업단지공단, 기업 / (주요내용) 세부투자계획 수립 논의, 자율주행 모빌리티 시범 운행 협의, 신산업분야 지원제도 발굴 등

❍ 2023.  6.: 자율주행자동차 시범운행지구 운영계획수립 용역* 시행

	《 용 역 개 요 》
❍ (용 역 명) 자율주행자동차 시범운행지구 운영계획수립 용역 ❍ (용역기간) 2023. 6. ~ 8. (3개월) ❍ (용 역 비) 20,020천 원 ❍ (용역업체) ㈜스프링클라우드(대표 송영기) / 경기도 성남시 소재 ❍ (용역내용) △ 자율주행자동차 시범운행지구 운영계획서 작성 △ 시범운행지구 대상지역 서비스 제시 △ 시범운행지구 운영, 관리방안 제시 △ 자율주행서비스를 위한 안전관리계획 등

❍ 2023.  8.: 자율주행자동차 시범운행지구 신규지정 신청(시→경남도→국토부)

❍ 2023.  9.: ｢사천시 4차 산업혁명 촉진 및 미래산업 육성 조례｣ 제정

❍ 2023. 11.: 자율주행자동차 시범운행지구 신규지정 확정(국토부)

	《 시범운행지구 개요 》
❍ (지 구 명) 경남 사천 자율주행자동차 시범운행지구 ❍ (위 치) 사천시 사천읍, 사남면, 동서동, 동서금동 일원 ❍ (총 연 장) 7.3㎞ ❍ (노 선) - 1단계(1구간): 사천공항~항공우주박물관(4.3㎞ / 대중교통연계형) - 2단계(2구간): 사천바다케이블카~삼천포항 방파제(3㎞ / 관광연계형)

추진상 애로사항 및 대책

❍ 우리시와 투자협약(MOU) 체결한 ㈜스프링社의 투자(공장, 연구 및 시험시설 등) 이행 불투명

❍ 자율주행차 시범운행지구의 안정적인 기반 구축을 위해 자율주행 관련 신규 파트너社 발굴 필요

향후 추진계획

❍ 2024. 10. ~ 12.: 자율주행자동차 시범운행지구 시범운행 실증

❍ 2025.  7. ~ 12.: 자율주행자동차 시범운행지구 기반 조성

❍ 2026.  1. ~  6.: 자율주행자동차 상업 운행 개시

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	50%	70%	90%	100%
자율주행 모빌리티 허브 구축 지원	- 자율주행 관련 기업 유치	- 자율주행자동차 시범운행지구 지정 - 미래(4차)산업 육성 조례 제정	- 자율주행차 시범운행지구 시범운행 실증	- 자율주행차 시범운행지구 기반 구축	- 자율주행차 상업운행 개시