3-10	어르신 당구장 설치

			관리번호		3-10
추진부서	문화체육과	협조부서	노인장애인과
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기후	팀 장	배수덕 (2419)	담당자		이서준 (2421)
임기 중 목표	정상추진(공사)	추진상황	정상추진	추진율		10%

목    적

❍ 어르신들이 사계절 부담없이 이용할 수 있는 당구장을 설치해 일상생활 활력 및 건강 증진

❍ 실버스포츠로 각광받고 있는 당구 저변 확대

사업개요

❍ 위    치: 사천시 사천읍 수석리 152번지 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2027년

❍ 사 업 량: 국민체육센터 건립 1식

❍ 사업내용: 국민체육센터(당구장, 헬스장 등)

❍ 사 업 비: 9,800백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	9,800	-	7,150	-	200	2,100	2,200	2.650	2.650
국비	3,000	-	3,000	-	200	1,400	1,400	-	-
도비	750	-	750	-	-	350	400	-	-
시비	6,050	-	3,400	-	-	350	400	2,650	2,650
기금	-	-		-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022. 12: 시니어 국민체육센터 건립지원 공모 선정

❍ 2023.  9.: 도시계획시설결정 용역 실시

❍ 2023. 10.: 공유재산 심의, 지방재정 투자심사(결과: 조건부 2단계)

❍ 2023. 12.: 시니어친화형 국민체육센터 복합화 추진계획 보고(방침)

❍ 2024.  4.: 기본계획수립 용역 완료, 공공건축 사업계획 사전검토

신청(도 공공건축지원센터)

❍ 2024.  5.: 사천도시관리계획(체육시설) 결정, 공공건축 사업계획

사전검토 결과 통보(도 공공건축지원센터): 2024. 5.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 최근 폭등한 건설 자재비·인건비 등으로 인해 당초 확보된 예산으로 정상적인 사업추진이 어려움.

❍ 당초 지방재정 투자심사시 총사업비 중 30% 미만을 증액 요청하여 투융자 재심사 절차없이 사업비를 확보하여 사업 추진코자 함.

향후 추진계획

❍ 2024.  7.: 공공건축심의위원회 심의, 설계공모

❍ 2024. 10.: 기본 및 실시설계 용역 착수

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		10%	20%	50%	100%
어르신 당구장 설치		도시계획시설 결정	설계공모 및 실시설계	착공	준공