3-14	완사역 관광형 역세권 개발

			관리번호		3-14
추진부서	관광진흥과	협조부서	환경보호과
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	신성현 (2734)	담당자		차재희 (2731)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		60%

목    적

❍ 완사역 관광형 역세권 개발로 관광인프라 확충 및 관광 활성화

사업개요

❍ 위    치: 곤명면 정곡리 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2024년

❍ 사업내용: 피크닉장 등 조성, 주차장 정비

❍ 사 업 비: 1,400백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	1,400	-	1,400	-	800	600	-	-	-
국비	1,400	-	1,400	-	800	600	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2019.  5.: 완사역 활성화를 위한 양해각서 체결

❍ 2022. 10.: 낙동강수계 주민특별지원 공모사업 선정(환경보호과)

❍ 2023.  3.: 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ 2023.  3.: 주민대표 협의

❍ 2023.  7.: 2023년분 공사 착공

❍ 2023. 12.: 2023년분 공사 준공

❍ 2024.  1.: 2024년분 실시설계 용역 착수

❍ 2024.  6.: 2024년분 공사 착공

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당없음

향후 추진계획

❍ 2024. 12.: 사업 완료

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		55%	100%
물빛정원 조성공사		2023년분 공사준공	사업완료