3-15	비토섬 관광지 개발

			관리번호		3-15
추진부서	관광진흥과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	신성현 (2734)	담당자		차재희 (2731)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		15%

목    적

❍ 비토섬 관광지 개발 및 별주부전 테마 강화로 관광인프라 확충 및 관광 활성화

사업개요

❍ 위    치: 서포면 비토리 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2026년

❍ 사업내용: 탐방보도교 L=180m, 보도 정비 L=150m, 포토존 조성, 경관조명 설치 1식

❍ 사 업 비: 1,850백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	1,850	-	1,850	-	50	-	1,000	800	-
국비	900	-	900	-	-	-	500	400	-
도비	270	-	270	-	-	-	150	120	-
시비	680	-	680	-	50	-	350	280	-
민자/기타	-	-		-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2023.  5.: 주민협의

❍ 2023.  6.: 기본구상 용역 완료

❍ 2024.  6.: 공모사업 신청

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당없음

향후 추진계획

❍ 2025.  1.: 실시설계 용역 착수

❍ 2025.  2.: 공유수면 점사용 승인 신청

❍ 2025.  3.: 2025년분 공사 착공

❍ 2025. 12.: 2025년분 공사 준공

❍ 2026.  2.: 2026년분 공사 착공

❍ 2026.  6.: 사업 완료

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)				45%	100%
비토섬 관광지 개발				2025년분 공사 준공	사업 완료