3-16	삼천포 무지갯빛 생태탐방로 조성

			관리번호		3-16
추진부서	관광진흥과	협조부서
사업성격	계속	사업주체	시
완료시기	임기후	팀 장	신성현 (2734)	담당자		김진우 (2730)
임기 중 목표	추진(60%)	추진상황	정상추진	추진율		20%

목    적

❍ 사천바다케이블카, 아라마루아쿠아리움과 연계한 해양관광 바닷길 조성으로 해양관광 중심 도시의 인프라 확충

사업개요

❍ 위    치: 동서동 일원(늑도~신도~마도~저도)

❍ 사업기간: 2020년 ~ 2027년

❍ 사업내용: 생태탐방로 설치 L=1.67km, B=2.0m (국립공원 내 1.47km)

❍ 사 업 비: 68,300백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	68,300	200	15,000	-	-	1,000	6,000	8,000	53,100
국비	34,050	-	7,500	-	-	500	3,000	4,000	26,550
도비	10,215	-	2,250	-	-	150	900	1,200	7,965
시비	24,035	200	5,250	-	-	350	2,100	2,800	18,585
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2019.  3.: 국립공원 저지대 탐방서비스 경연대회 선정(특별상 수상)

❍ 2020.  6.: 국토교통부 「남해안권 발전종합계획 변경」 최종 확정

❍ 2020.  7.: 기획재정부 「한국판 뉴딜–그린뉴딜」 종합계획 반영

❍ 2020. 10.: 국립공원 생태 문화·교육 플랫폼 기본구상 수립용역 추진

❍ 2021.  4.: 기본구상 수립결과 반영(국립공원공단)

❍ 2022.  1.: 한려해상국립공원 사천지구 해상탐방로 공원계획(변경)용역 착수

❍ 2023.  7.: 타당성 조사 용역 완료

❍ 2023.  9.: 도시계획시설 결정(변경) 용역 시행

❍ 2023. 11.: 관광자원개발사업 선정

❍ 2024.  3.:사업수행능력평가 시행

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당없음

향후 추진계획

❍ 2024.  7.: 실가시설계용역 착수

❍ 2025.  2.: 공유수면 점․사용 신청

❍ 2025.  4.: 공사 착공

❍ 2027. 12.: 공사 준공

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		15%	30%	50%	60%	100%
삼천포 무지갯빛 생태탐방로 조성		타당성 조사 용역, 도시계획시설 결정 용역	실시설계 용역	2025년분 공사 준공	2026년분 공사 준공	사업 완료