3-20	용현~대포 해안도로 관광자원화 기반 마련

			관리번호		3-20
추진부서	관광진흥과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기후	팀 장	신성현 (2734)	담당자		차재희 (2731)
임기 중 목표	추진(50%)	추진상황	정상추진	추진율		5%

목    적

❍ 선상지의 경관가치를 활용하여 차별화된 지역특화 관광콘텐츠 발굴과 관광브랜드로 자원화하여 지역경제 성장동력 확보

사업개요

❍ 위    치: 용현면 주문리 일원

❍ 사업기간: 2024년 ~ 2027년

❍ 사업내용

- 선상지 경관전망대 1식

- 경관개선 쉼터조성, 야관경관 등 부대시설 조성

❍ 사 업 비: 18,736백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	18,736	-	14,484	-	-	846	7,638	6,000	4,252
국비	9,368	-	7,242	-	-	423	3,819	3,000	2,126
도비	2,810	-	2,172	-	-	127	1,145	900	638
시비	6,558	-	5,070	-	-	296	2,674	2,100	1,488
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022.  6.: 남부권 광역관광개발계획 신규사업 신청

❍ 2023.  7.: 제2회 지방재정계획 심의 반영

❍ 2023.  9.: 남부권 광역관광개발계획 신규사업 확정

❍ 2023. 10.: 4차 경상남도 지방재정 투자심사 심의 반영(조건부 2단계)

❍ 2024.  3.: 건축기획 용역 착수

❍ 2024.  6.: 공공건축 사업계획 사전검토 신청

추진상 애로사항 및 대책

❍ 해당사항 없음

향후 추진계획

❍ 2024.  7.: 공공건축심의위원회 심의

❍ 2024.  8. ~ 2025.  4.: 건축설계공모 및 실시설계

❍ 2025.  5.: 공사 착공

❍ 2027. 12.: 사업 완료

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)			10%	30%	50%	100%
선상지 테마 관광명소 조성사업			기본 및 실시설계	공사추진	공사 추진	사업 완료