3-21	다솔사 주변(다솔 문화밸리) 조성

			관리번호		3-21
추진부서	관광진흥과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	신성현 (2734)	담당자		김진우 (2730)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		35%

목    적

❍ 다솔사 주변 문화밸리 조성으로 관광인프라 확충 및 관광활성화

사업개요

❍ 위    치: 곤명면 용산리 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2025년

❍ 사업내용: 경관조명 설치, 진입로 정비, 휴양길 조성, 사찰음식 체험관 조성 등

❍ 사 업 비: 1,900백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	1,900	-	1,900	-	200	800	900	-	-
국비	950	-	950	-	100	400	450	-	-
도비	665	-	665	-	30	120	135	-	-
시비	285	-	285	-	70	280	315	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022. 10.: 관광자원개발사업 선정

❍ 2023.  5.: 2023년분 실시설계용역 완료

❍ 2023.  6.: 2023년분 공사 착공

❍ 2023. 11.: 2023년분 공사 준공

❍ 2024.  4.: 2024년분 실시설계용역 시행

향후 추진계획

❍ 2024. 8: 총괄분 공사 착공

❍ 2025. 5.: 총괄분 공사 준공 및 사업완료

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		30%	70%	100%
다솔 문화밸리 조성		실시설계 및 공사추진	공사 추진	사업 완료