3-22	신수도 관광지 개발

			관리번호		3-22
추진부서	건설과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	장경현 (3254)	담당자		한현상 (3252)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		60%

목    적

❍ 제4차 도서종합개발 사업의 일환으로 해양 경관을 활용한 관광지 조성으로 주민소득증대 기여 및 관광활성화 도모

사업개요

❍ 위    치: 사천시 신수동(신수도) 일원

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2024년

❍ 사업내용: 야영장, 탐방로 등 신수도 관광지 조성

❍ 사 업 비: 2,646백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	2,646	-	2,646	816.4	1,272	557.6	-	-	-
국비	2,117	-	2,117	653	1,018	446	-	-	-
도비	264.5	-	264.5	81.7	127	55.8	-	-	-
시비	264.5	-	264.5	81.7	127	55.8	-	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022. 3.: 야영장 부대시설 증축공사 착공

❍ 2022. 9.: 야영장 부대시설 증축공사 준공

❍ 2023. 4.: 주민설명회 개최

❍ 2023. 7.: 관광 기반시설 실시설계 용역 준공

❍ 2023. 9.: 관광 기반시설 공사 착수

❍ 2024. 6.: 관광 기반시설 공사 기성금 지급

추진상 애로사항 및 대책

❍ 시공사(남명건설) 부도(2023.11.)에 따른 회생절차 진행 중

- 하도급, 자재, 장비 등 공사대금 직불처리를 통한 사업 추진

향후 추진계획

❍ 2024. 9.: 관광 기반시설 공사 준공

연도별 달성목표

단위사업명	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
추진율(누계)	60%	100%
신수도 관광지 조성사업	실시설계 용역 및 공사 추진	공사 완료