3-24	재래시장 활성화 지원 및 주차시설 확보

			관리번호		3-24
추진부서	지역경제과	협조부서	-
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	문상희 (3064)	담당자		천영조 (3061)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		60%

목    적

❍ 재래시장(전통시장) 시설물 보수 및 현대화로 경제 활성화 제고

사업개요

❍ 지원대상: 사천시 전통시장 8개소

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2026년

❍ 사 업 량: 4개 사업(전통시장 활성화 3, 주차시설 1)

❍ 사업내용

- 전통시장 활성화 지원사업: 시설 현대화 사업, 전통시장 활성화 사업, 하수구 정비 및 시설물 보수

- 주차시설 확보 사업: 사천읍시장 주차장 증설

❍ 사 업 비: 5,022백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	5,022	-	5,022	1,666	930	1,006	670	750	-
국비	170	-	170	170	-	-	-	-	-
도비	1,645	-	1,645	489	264	400	222	270	-
시비	3,207	-	3,207	1,007	666	606	448	480	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 추진 현황(2022 ~ 2026년)

(단위: 백만 원)

구 분				2022년		2023년		2024년		2025년 (예정)	2026년 (예정)
				사업대상	사업비	사업대상	사업비	사업대상	사업비
사 업 비			5,022	1,666		930		1,006		670	750
전통시장 활성화	시설 현대화	소 계	2,741	815		440		666		370	450
		아케이드 교체	1,310	사천읍시장	230 (도 138 시 92)	사천읍시장	272 (도 163 시 109)	사천읍시장 곤양종합시장	348 (도 209 시 139)	210	250
		아케이드 기둥 도색	110		-		-	삼천포중앙시장	110 (도 66 시 44)	-	-
		전기 시설 보수	585	사천읍시장 삼천포중앙시장	585 (도 351 시 234)		-		-	-	-
		비가림시설 설치	576		-	삼천포중앙시장	168 (도 101 시 67)	전통수산시장	208 (도 125 시 83)	-	200
		스틸그레이팅 설치	110		-		-		-	110	-
		건물외벽 도색	50		-		-		-	50	-
	시장 활성화	소 계	1,801	771		270		260		250	250
		노후전선 정비	171	용궁수산시장	171 (국 85.5 시 85.5)		-		-	-	-
		화재알림시설 설치	120	사천읍시장 외 2개소	120 (국 84 시 36)		-		-	-	-
		출입구 기둥 도색	20	삼천포중앙시장	20		-		-	-	-
		비가림시설 보수	300	전통수산시장	160		-		-	70	70
		상인회 사무실 정비	20	전통수산시장	20		-		-	-	-
		노후시설 보수	195	전통시장 8개소	50		-	전통시장 8개소	45	50	50
		주차장 보수	90	삼천포종합시장	30		-		-	30	30
		옥상 방수	200	전통수산시장 용궁수산시장	200		-		-	-	-
		옥상 태양광 설치	20		-	완사시장	20		-	-	-
		옥상 정밀 안전진단	20		-	완사시장	20		-	-	-
		CCTV설치	20		-	서포시장	20		-	-	-
		먹자골목 조성 컨설팅 용역	20		-	삼천포중앙시장	20		-	-	-
		아케이드 설치 및 정비	290		-	새벽시장	190		-	50	50
		냉각기 옥외 거치대 설치	100		-		-	용궁수산시장	100	-	-
		해수공급시설 비상발전설비 구축	55		-		-	전통수산시장 용궁수산시장	95	-	-
		해수공급시설 수선	120		-		-	전통수산시장 용궁수산시장	20	50	50
	하수구 정비	소 계	450	80		220		50		50	50
		하수관로 준설 및 보수	430	전통시장 8개소	80	전통시장 8개소	200	전통시장 8개소	50	50	50
		우수관로 정비	20			서포시장	20		-	-	-
주차시설 확보		소 계	30	-		-		30		-	-
		사천읍시장 주차장 증설	30		-		-	사천읍시장	30	-	-

❍ 전통시장 활성화 지원사업(계속)

- 시설현대화 사업, 전통시장 활성화 사업, 하수구 정비 및 시설물 보수 계속 추진

❍ 주차시설 확보(신규)

- 2023. 2월         : 사천읍시장 주차장 조성 공사 계획 수립

- 2024. 1. 15.       : 편입토지 등 소유자 부동산 매매 사전동의서 징구(3필지)

- 2024. 2. 5.        : 사천읍시장 주차환경개선사업 사전 컨설팅 용역 완료

- 2024. 2. 16.       : 2025년도 전통시장 주차환경개선사업 공모 신청

- 2024. 3. 13.       : 2025년도 전통시장 주차환경개선사업 현장평가 수행

- 2024. 3월        : 지원 대상 선정 결과 제출(경남도 ⇒ 중기부)

- 2024. 4. 18. ~ 19.: 최종 선정 협의회 개최(중기부)

추진상 애로사항 및 대책

❍ 주차환경개선사업 공모사업 미선정 시 주차시설 확보 애로

향후 추진계획

❍ 전통시장 활성화 지원

- 2024. 4. ~ 12.: 전통시장 시설현대화 및 활성화사업 추진(계속)

- 2024. 9. : 2024년도 화재알림 설치, 노후전선 보수 공모사업 시행(선정 시)

- 2025. 1. : 2025년도 전통시장 시설현대화 공모사업 사업 시행(선정 시)

❍ 사천읍시장 주차장 증설

- 2024. 9.: 경남도 예산 확보 후 선정결과 통보 예정(경남도 ⇒ 시)

- 2024. 9. : ’25년 당초예산 편성

- 2025. 1. ~ 12.  : 사업 시행

연도별 달성목표

세부사업명		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		33%	52%	71%	85%	100%	-
전통시장 활성화	시설현대화 사업	2개소 815백만원	3개소 1,255백만원	5개소 1,921백만원	6개소 2,291백만원	8개소 2,741백만원	-
	전통시장 활성화 사업	8개소 771백만원	8개소 1,041백만원	8개소 1,301백만원	8개소 1,551백만원	8개소 1,801백만원	-
	하수구정비 및 시설물 보수	8개소 80백만원	8개소 300백만원	8개소 350백만원	8개소 400백만원	8개소 450백만원	-
사천읍시장 주차시설 확보		-	·감정평가실시 ·토지소유자 매매동의서 징구	·컨설팅 용역 30백만원 ·토지소유자 매매 동의 완료 ·공모사업 신청	·사업비 미정 ·공모사업 선정 시 사업 시행	주차장 증설 사업 완료	-