3-26	용궁수산시장 및 전통시장 환경개선사업 확대 추진

			관리번호		3-26
추진부서	지역경제과	협조부서	-
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	문상희 (3064)	담당자		천영조 (3061)
임기 중 목표	완료	추진상황	완료	추진율		100%

목    적

❍ 수산시장 해수공급시설 및 환경개선을 통한 청정해수 공급 수산 시장으로서의 이미지 제고

사업개요

❍ 지원대상: 삼천포용궁수산시장, 삼천포전통수산시장

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2026년

❍ 사 업 량: 4개 사업

❍ 사업내용

- 해수공급 설치사업: 삼천포용궁수산시장, 삼천포전통수산시장 해수인입시설 설치

- 환경개선사업  ┏ 삼천포용궁수산시장(옥상 방수)

┣ 삼천포용궁수산시장(옥상 물탱크, 출입문 교체)

┗ 삼천포전통수산시장(바닥 및 간판 정비 등)

❍ 사 업 비: 4,719백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	4,719	-	4,719	3,654	950	75	20	20	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,719	-	4,719	3,654	950	75	20	20	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 삼천포수산시장 해수공급시설 설치사업

- 기본 및 실시설계 용역 완료: 2021. 12.

- 행정절차 등 이행: 2022. 1~6.

· 도로 점용(굴착) 도로관리 심의 완료, 도시관리계획 결정(수도공급설비)

· 펌프장 무상 귀속 협의,  공유수면실시계획 신고, 간이해역이용협의

· 도로점용(굴착) 허가, 도시계획시설(수도공급설비)사업 실시계획인가

· 사업설명회 개최(1차), 공용건축물 협의 완료(펌프실)

- 공사 착공: 2022. 7.

- 공사 추진에 따른 안전성 검토 등 협의: 2022. 7~12.

· 설계안전성 검토(국토안전관리원), 안전관리계획서 검토 완료

· 항만시설 사용허가 연장, 시험 굴착 작업 완료(지하매설물 위치파악)

- 송수관로 부설 및 임시포장 완료: 2023. 1.

- 취수펌프장 가시설 설치 및 상치공·테트라포트 철거 완료: 2023. 2.

- 취수펌프장 타설 및 용궁수산시장 내부 배관 작업 완료: 2023. 3~5.

- 해수 유통구 및 취수펌프장(지하)내부공사 완료: 2023. 8.

- 취수펌프장 시운전 및 점검 완료: 2023. 9. 19.

- 삼천포수산시장 해수공급시설 설치사업 준공: 2023. 9. 21.

❍ 환경개선사업

- 삼천포용궁수산시장(옥상방수,물탱크,출입문교체) 완료: 2023. 6.

- 삼천포전통수산시장(새벽시장) 간판 및 바닥 정비 완료: 2023. 12.

향후 추진계획

❍ 삼천포수산시장 해수공급시설 운영 관리 및 보완

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	10%	40%	100%	100%	100%
용궁수산시장 및 전통시장 환경개선사업 확대 추진	-삼천포수산시장해수공급시설 공사 착공 -환경개선사업 수행완료	-삼천포수산시장 해수공급시설 공사 준공 -환경개선사업 수행완료	-삼천포수산시장 해수공급시설 운영 및 보완	-삼천포수산시장 해수공급시설 운영 및 보완	-삼천포수산시장 해수공급시설 운영 및 보완