3-31	미래 농축수산업 혁신 스마트팜 선도농가 육성

			관리번호		3-32
추진부서	기술지원과	협조부서	농축산과(축산팀), 해양수산과(자원조성팀)
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	하란주 (3879)	담당자		이현정 (3877)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		45%

목    적

❍ 농·축·수산물 브랜드 농가 확대 및 홍보를 통한 인지도 향상

❍ 사천을 대표하는 축산물 공동 브랜드 개발을 통해 사천 축산물 인지도 제고

사업개요

❍ 위    치: 사천시 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2026년

❍ 사업내용: ICT 기반구축을 위한 시설·장비, 환경제어시스템 및 컨설팅 지원, 수산 ICT 융합 모델화 시스템 장비 유지관리

❍ 사 업 비: 6,622백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	6,622	-	5,292	436	866	1,330	1,330	1,330	1,330
국비	1,626	-	1,290	96	186	336	336	336	336
도비	415	-	334	27	64	81	81	81	81
시비	1,968	-	1,598	195	293	370	370	370	370
민자/기타	2,613	-	2,070	118	323	543	543	543	543

추진상황

❍ 농업분야

- ’23년 스마트팜 ICT 융복합확산 지원 사업완료(22개소/ 717백만 원): 2023. 12.

- ’23년 스마트팜 현장센터 운영지원 완료(5개소/14백만 원): 2023. 12.

- ’23년 스마트팜 연구센터 운영 완료(5개소/100백만 원): 2023. 12.

- ’24년 스마트팜 ICT 융복합확산 지원사업 대상자 선정(3개사업/731백만 원): 2024. 3.

- ’24년 과수 스마트팜 확산 사업 대상자 선정(1개소/67백만 원): 2024. 3.

- ’24년 스마트팜연구센터 운영 지원(1개소/100백만 원): 2024. 3.~6.

- ’24년 스마트팜 ICT 융복합확산 지원사업 준공(5개소/146백만 원): 2024. 4.~6.

❍ 축산분야

- ’23년 축산분야 ICT 융복합 확산 사업 완료(1개소/100백만 원): 2023. 12.

- ’24년 축산분야 ICT 융복합 확산 사업 대상자 선정(2개소/300백만 원): 2024. 3.

❍ 수산분야

- ’23년 수산 ICT 융합 모델화 시스템 유지관리(용역비/31백만 원): 2023. 1. ~ 12.

- ’24년 수산 ICT 융합 모델화 시스템 유지관리 시행(용역비/31백만 원): 2024. 1.

추진상 애로사항 및 대책

❍ 농업분야

- 국내 일부 장비의 업체별 표준화 미비

- 스마트팜 활용농가는 증가추세이나 대부분 단순, 편의형 활용으로 추진방향과       현실에 차이 발생

- 자동화에 따른 에너지(전기, 유류 등) 사용량 증가에 따른 경영비 증가

- 재배 작기 및 잦은 강우로 인한 착공 지연(현재 대부분 사업이 착공되어 연내       사업 완료 가능)

- 스마트팜 현장지원센터 운영 사업비가 전액 삭감되고, 과수 스마트팜 확산 사업 예산 확보

❍ 축산분야

- 스마트팜 사업 특성상 대규모 투자가 이루어지는 사업으로 농가부담이 큼

- 축산농가 경영비 부담 감소를 위한 시비부분 추가 예산확보

❍ 수산분야

- 해양환경에 따라 수분, 염도 및 날씨 등의 영향으로 장비 내구도 저하에 따라       지속적 유지보수 관리 필요

- 수산 ICT 융합 모델화 시스템 유지관리 용역 시행 및 장비 소모품 교체(DOcap, 센서 등) 예산확보

향후 추진계획

❍ 농업분야

- 스마트팜 ICT 융복합확산 지원 사업 추진: 2024. 7. ~ 12.

· 원예분야 ICT 융복합확산 지원: 3개소 / 104백만 원(보조 67 자담 47)

· 시설원예현대화 지원: 6개소 / 226백만 원(보조 124 자담 102)

· 농업분야 에너지 절감시설 지원: 7개소 / 255백만 원(보조140 자담115)

- 스마트팜 연구센터 운영 사업 추진: 2024. 7. ~ 12.

· 1개소 /100백만 원(보조 100)

- 과수 스마트팜 확산 사업 추진: 2024. 7. ~ 12.

· 1개소 /67백만 원(보조 33.5 자담 33.5)

❍ 축산분야

- 축산분야 ICT 융복합 확산사업 추진: 2024. 7.~12.

· 2개소/ 300백만 원(보조 120 자담 180)

- 스마트 축사환경 조절 젖소 열 스트레스 저감기술 시범사업 추진: 2024. 7. ~ 12.

· 3개소/100백만 원(보조 100)

❍ 수산분야

- 수산 ICT 융합 모델화 시스템 유지관리: 2024. 7. ~ 12.(용역비/31백만 원)

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	20%	40%	60%	80%	100%	100%
농업분야 스마트팜 육성	- ICT 융복합 확산 20개소 - 스마트팜 현장지원센터 운영 1개소 - 스마트팜연구 센터: 1개소	- ICT 융복합 확산 20개소 - 스마트팜 현장지원센터 운영 1개소 - 스마트팜연구 센터: 1개소	- ICT 융복합 확산 20개소 - 과수 스마트팜 확산 1개소 - 스마트팜연구 센터: 1개소	- ICT 융복합 확산 20개소 - 과수 스마트팜 확산 1개소 - 스마트팜연구 센터: 1개소	- ICT 융복합 확산 20개소 - 과수 스마트팜 확산 1개소 - 스마트팜연구 센터: 1개소	- ICT 융복합 확산 20개소 - 과수 스마트팜 확산 1개소 - 스마트팜연구 센터: 1개소
축산분야 스마트팜 육성		- 스마트 축사 환경조절 시범 사업 신청	- 스마트 축사 환경조절 시범 사업 추진	- 스마트 축사 환경조절 시범 사업 추진	- 스마트 축사 환경조절 시범 사업 추진	- 스마트 축사 환경조절 시범 사업 추진
수산분야 스마트팜 육성	- 수산 ICT 융합 모델화시스템 장비유지관리 5개소	- 수산 ICT 융합 모델화시스템 장비유지관리 5개소	- 수산 ICT 융합 모델화시스템 장비유지관리 5개소	- 수산 ICT 융합 모델화시스템 장비유지관리 5개소	- 수산 ICT 융합 모델화시스템 장비유지관리 5개소	- 수산 ICT 융합 모델화시스템 장비유지관리 5개소