3-9	야구장 조성사업

			관리번호		3-9
추진부서	문화체육과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기후	팀 장	배수덕 (2419)	담당자		노범석 (2415)
임기 중 목표	정상추진(공사)	추진상황	정상추진	추진율		5%

목    적

❍ 신규 야구장 조성을 통한 생활체육 활성화

❍ 야구인프라 개선으로 전지훈련팀 유치 기대

사업개요

❍ 위    치: 사천시 서포면 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2027년

❍ 사 업 량: 야구장 조성

❍ 사업내용: 야구장 1~2면(A=44,500㎡), 본부석 1동, 주차장 등

❍ 사 업 비: 10,500백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내								임기후
			소계		2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	10,500	-	7,360	-		60	-	4,100		3,200	3,140
국비	1,800	-	900	-		-	-	-		900	900
도비	-	-	-	-		-	-	-		-	-
시비	8,700	-	6,460	-		60	-	4,100		2,300	2,240
기금	-	-	-	-		-	-	-		-	-

추진상황

❍ 2022.  9.: 야구장 조성 계획 보고

❍ 2022. 11.: 주민설명회 개최

❍ 2022. 11.: 중기지방재정계획 반영

❍ 2023.  2.: 사천시 지방재정투자심사 승인

❍ 2023.  4.: 입지선정 및 기본계획용역

❍ 2023.  7.: 용역중간보고

❍ 2023. 12.: 용역최종보고회 및 추진계획보고

❍ 2024.  3.: 도시관리계획결정(변경) 용역 추진

❍ 2024.  5.: 공유재산관리심의회

추진상 애로사항 및 대책

❍ 사등야구장이 환경사업소 내 위치하여 악취 등 주변 환경이 열악하고, 추후 소각장 증축 시 야구장 이전 불가피

❍ 현장여건 변화등으로 추정사업비 증액 불가피

→ 야구장 부지 전체계획 후 야구장 1면 선 추진 후 2면 추진

향후 추진계획

❍ 2024. 8.: 도시계획위원회

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		10%	20%	30%	50%	100%
야구장 조성		입지선정 및 기본계획	도시계획결정	보상	착공	준공