5-2	팔포음식특화지구 마리나항 개발

			관리번호		5-2
추진부서	해양수산과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기후	팀 장	송동주 (3139)	담당자		유성수 (3135)
임기 중 목표	착수	추진상황	정상추진	추진율		10%

목    적

❍ 수상레저선박의 지속적 증가에 따른 마리나항 및 관련시설 확충

❍ 해양레포츠 관광객 유치 및 지역경제 활성화 기여

사업개요

❍ 위    치: 사천시 서금동 팔포음식특화지구 일원(목섬 인근)

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2029년

❍ 사업내용: 요트계류시설, 보관 및 수리시설, 상하가 시설, 기타편의시설 등

❍ 사 업 비: 6,000백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	6,000	-	1,300	22	-	100	200	978	4,700
국비	-	-	-		-	-	-	-	-
도비	-	-	-		-	-	-	-	-
시비	6,000	-	1,300	22	-	100	200	978	4,700
민자/기타	-	-	-		-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2021.  7.: 마리나항 조성에 따른 주민협의 및 현장 검토

❍ 2022.  2. ~  6.: 타당성 조사 용역 착수 및 완료

- 팔포음식특화지구 마리나항 조성사업 경제성 및 타당성 검토

(정온수역 확보 애로, 주변수역 확대 재조사 필요)

- 주민건의사항(해상계류시설 확대) 반영

❍ 2023.  1.: 마리나항만 기본계획 반영 사전협의

- 제2차 마리나항만 기본계획 반영 가능 여부 협의(해양수산부 해양레저관광과)

❍ 2023.  1.: 어촌계 사업 관련 설명

- 마리나항만 시설 설치를 위한 사업개요 사전 설명(팔포어촌계)

❍ 2023.  1.; 전국항만기본계획 반영 사전 협의

- 제4차 전국항만기본계획 반영 가능(경상남도 해양항만과)

❍ 2023.  3.: 사업계획서 작성 및 기본계획 반영 용역 일상감사

- (일상감사 의견) 기 완료된 타당성조사 용역결과 활용하여 “제2차 마리나항 기본계획” 변경 신청

❍ 2023.  9.: 제2차 마리나항만 기본계획 변경(소규모계류시설 후보지) 반영 신청

(소규모계류시설 후보지: 신수항, 광포항, 팔포항)

❍ 2024.  4.: 제2차 마리나항만 기본계획 변경 용역 시행을 위한 팔포항

주변 기본현황조사 용역비 추경 신청(제1회 추경, 미반영)

추진상 애로사항 및 대책

❍ 항만 및 마리나항만 기본계획 변경을 위한 기본계획 용역비 미반영으로 사업 절차 이행 지연

❍ 제2회 추경 예산확보 및 마리나항만 조성 가능 공모사업 공모 등

향후 추진계획

❍ 2024.  9.: 마리나항 주변 기본현황조사 용역비 확보(제2회 추경)

❍ 2024. 10.; 마리나 항만 대상지 주변 기본현황 조사용역 시행

❍ 2025.  6.: 소규모 계류시설 후보지 선정 및 제2차 마리나항만 변경계획 수립 반영

❍ 2026.  2.: 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2027.  5.: 공사 착공

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 2월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	15%	25%	40%	100%
팔포음식특화지구 마리나항 개발	타당성 조사용역	마리나항만 기본계획 변경 신청	마리나 항만 대상지 주변 조사 용역	마리나항만 기본계획 변경 반영	마리나항만 조성 실시설계	마리나 항만 조성 완료