5-26	새로운 산업단지 조성

			관리번호		5-26
추진부서	투자유치산단과	협조부서	-
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기후	팀 장	배명희 (3469)	담당자		김수언 (3465)
임기 중 목표	50%	추진상황	정상추진	추진율		10%

목    적

❍ 낙후된 동 지역에 산업단지를 조성하여 지역의 특성과 역량에 맞는 기업을 유치하여 지역 균형 발전과 지역경제 활성화에 기여

사업개요

❍ 위    치: 사천시 향촌동 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2028년

❍ 사업내용: 산업단지 조성 A=310,000㎡

❍ 사 업 비: 100,000백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	100,000	-	22,072	50	-	22	2,000	20,000	77,928
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	100,000	-	22,072	50	-	22	2,000	20,000	77,928
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022.  7.: 민선8기 시장 공약사항 확정

❍ 2023. 12.: 입지 타당성 분석 용역

❍ 2024.  5.: 입주 수요조사 용역 착수

추진상 애로사항 및 대책

❍ 향촌2 외 2개(용당MRO, 서부) 산단이 조성 완료 또는 조성 중임

❍ 미분양과 조성사업에 따른 시비 및 지방채 부담 가중

- 우선 입지 타당성과 입주업종 분석 용역을 선행하고 사천시 산업단지의 분양 추이, 시비 및 지방채 부담 등이 최소화되는 시점을 감안하여 행정절차 추진

향후 추진계획

❍ 2025. 1.: 산업단지 지정계획 반영(경상남도 수립)

❍ 2025. 1.: 타당성 조사 용역

❍ 2025. 7.: 지방재정 투자심사

❍ 2026. 1.: 산업단지계획 수립 용역 추진

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	20%	30%	50%	100%
새로운 산업단지 조성	입지 타당성 분석 추진	입지 타당성 분석 완료	산업단지 지정용역 추진 (수요조사, 타당성 조사 등)	타당성 조사 및 투자심사 등	산업단지계획 승인 및 용지 보상 추진, 공사 착공	산업단지 완공