5-3	노산공원과 목섬을 잇는 무지개다리 건립

			관리번호		5-3
추진부서	해양수산과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	하진건 (3129)	담당자		김태현 (3125)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진	추진율		30%

목    적

❍ 노산공원 및 팔포음식특화단지 등을 방문하는 방문객들의 볼거리      부족으로 볼거리 제공 및 관광객 유치

사업개요

❍ 위    치: 사천시 서금동 147-1번지 일원

❍ 사업기간: 2023년 ~ 2026년

❍ 사업내용: 보도교 설치(L=120m) 및 경관조명 1식

❍ 사 업 비: 7,997백만 원

(단위:백만 원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	7,997	-	7,997	-	158	2,077	3,000	2,762	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	7,997	-	7,997	-	158	2,077	3,000	2,762	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2021. 12.: 제4차 항만기본계획 고시(2021~2030)

❍ 2022.  1.: 국회의원(하영제) 해수부 건의 자료 제출

❍ 2022.  4.: 지방 소멸 대응 발굴 자료 제출

❍ 2023.  1.: 사업추진계획 방침 결정

❍ 2023.  2.: 사업비 확보 관련 해수부 및 경남도 협의, 일상감사 및 계약심사

❍ 2023.  3.: 보행자 교량 견학(창원시, 거제시)

❍ 2023.  4.: 용역 계약 및 착수

❍ 2023.  5.: 용역 착수보고

❍ 2023.  9.: 용역 중간보고

❍ 2024.  1.: 항만기본계획 변경(경미한 변경) 고시

❍ 2024.  2.: 간이해역이용협의 완료

❍ 2024.  2.: 경관심의 완료

❍ 2024.  4.: 경상남도 제3회 지방건설기술심의(공기산정 적정성) 완료

❍ 2024.  4.: 비관리청 항만개발사업 시행 허가

❍ 2024.  5.: 계약심사 및 공사시행

❍ 2024.  6.: 항만개발사업 실시계획 승인 신청(사천시→경상남도 해양항만과)

❍ 2024.  6.: 도시관리계획(시설:항만) 결정(변경) 용역 준공

❍ 2024.  6.: 설계안전성 검토 완료

❍ 2024.  6.: 입찰 의뢰

추진상 애로사항 및 대책

❍ 전환사업으로 국·도비 지원 불투명하며, 사업비 과다(7,997백만 원) 소요에 따른 예산확보 애로

❍ 원활한 사업 추진을 위하여 국·도비 지원 지속 건의(해수부, 경남도)

향후 추진계획

❍ 2024.  7.: 공사 착공

❍ 2026. 12.: 공사 준공

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)	-	20%	40%	70%	100%
노산공원과 목섬을 잇는 무지개교 건립	-	실시설계용역 및 해역이용협의 (예산 건의)	예산확보 및 공사 착공	공사 진행	공사 준공