5-30	모충공원 정비사업 조기완공 [모충공원 공공파크골프장 조성)

			관리번호			5-30
추진부서	녹지공원과	협조부서
사업성격	신규	사업주체	시
완료시기	임기내	팀 장	조명철 (3419)	담당자				조명철 (3419)
임기 중 목표	완료	추진상황	정상추진		추진율		50%

목    적

❍ 동적인 생활권 공원조성으로 공원이용 활성화 및 녹색 힐링공간 제공

❍ 실안관광상품과 연계한 체류형 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 도모

사업개요

□ 위    치: 사천시 송포동 산165-1번지 일원(모충공원)

□ 사업기간: 2023년 ~ 2024년

□  사업내용:  파크골프장(27홀), 관리동(354㎡,) 주차장(100면), 쉼터(833㎡),   관리도로(1.5km) 등

❍ 사 업 비: 9,300백만 원

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	임기 내						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
계	9,300	-	9,300	-	1,300	8,000	-	-	-
국비	1,300	-	1,300	-	1,300	-	-	-	-
도비	2,400	-	2,400	-	-	2,400	-	-	-
시비	5,600	-	5,600	-	-	5,600	-	-	-
민자/기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 2022. 12.: 공원조성계획 및 실시설계 용역

❍ 2023.  2.: 공원조성계획 시의회 의견청취

❍ 2023.  4.: 사천시 도시계획위원회 심의(조건부 승인)

❍ 2023.  4.: 문화재 지표조사

❍ 2023.  5.: 경상남도 지방재정 투자심사위원회 심의(조건부 승인)

❍ 2023.  7.: 공원조성계획(변경) 고시

❍ 2023.  8.: 실시계획인가(변경) 고시

❍ 2023.  9.: 사업(총괄분) 시행

❍ 2023. 11.: 공사착공

❍ 2024.  6.: 건축/전기/통신 공사착공

추진상 애로사항 및 대책

❍ 행정절차 이행 지연에 따른 조기 착공 애로

향후 추진계획

❍ 2024. 12.: 공사준공

연도별 달성목표

세부사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 6월	임기후
추진율(누계)		30%	100%
모충공원 공공파크골프장 조성		실시설계용역 공사착공	공사준공